문서번호	기반시설과-4187
결재일자	2023. 6. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
이준범		代이호연	06/15
			김종호
협조

「한강공원 매점(반포1,2호)리모델링공사」

실정보고 검토 보고

2023. 06.

한강사업본부

(기반시설과)

「한강공원 매점(반포 1,2호) 리모델링 공사」

실정보고 검토 보고

부력체 안전점검에 따른 부력체 보강공사 및 공사중 추가 공사 (지붕방수, 보도포장)필요가 확인되어 안전한 편의시설 제공을 위한 실정보고 검토 보고임.

Ⅰ		관 련 근 거

□ 실정보고 검토(감리) 보고[*********('23.06.15.)호]

Ⅱ		공 사 개 요

□ 공 사 명: 한강공원 매점(반포1,2호)리모델링 공사

□ 공사기간: ***********************

□ 도 급 비: ************

□ 도 급 사: ********

□ 감 리 사: ***********

Ⅲ		보 고 내 용

□ 부력체 안전점검 결과에 따른 부력체 보강공사.

*******************************

****************************************

**********************

*************************************

***********************************************

************************************************************

□ 단가 및 물량 검토

○ 단     가

- 계약단가 적용

- 계약 미포함 공정 신규단가 적용시 낙찰율*********적용

*********************

**********************

○ 물량 검토: 감리 검토의견과 같이 적정함.

□ 공사비 증감 현황

(단위: 원)

***		**	**	***
***	****	***********	***********	************
	*****	**********	**********	************
	*	***********	***********	************

□ 감리 검토 의견

○ 안전한 편의시설 제공 및 유지관리 등을 위해 추가공사는 필요하며, 단가 및 물량 검토 결과 적정함.

Ⅳ		조 치 의 견

□ 부력체 안전점검 결과에 따른 부력체 보강공사는 필요하며, 안전하고 편리한 편의시설 제공을 위한 천장 누수 방수 공사 및 매점앞 보도공사는 타당하며, 감리의견과 같이 단가 및 물량 검토 결과 적정하다고 판단됨.

□ 추후 계약금액 조정시 공사 물량 및 단가, 금액을 확정코자함.

붙임  1. 실정보고 검토 보고 1부.

2. 내역서 1부.  끝.