문서번호	토목부-10846
결재일자	2023. 6. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
노승환		박장진	06/15
			이임섭
협조
	주무관		홍현기

- 강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사- 상부 방음판 교체공사 기존자재 고재처리 검토 보고

- 강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사-

상부 방음판 교체공사 기존자재 고재처리 검토 보고

2023. 6.

도시기반시설본부

(토    목    부)

- 강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사-

상부 방음판 교체공사 기존자재 고재처리 검토 보고

『염곡동서 및 구룡지하차도 방음터널 교체공사』중 발생하는 ********************************

********************

Ⅰ		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 강남순환도시고속도로 8공구 건설공사

○ 공사규모 : 연장 7.96km, 왕복 4~10차로(교량 2개소, 지하차도 4개소)

○ 공사기간 : 2002.7.3 ~ 2024. 12. 31

○ 도 급 비 : 3,564억원

○ 시공사/건설사업단 : 롯데건설(주),(주)SM상선 / ㈜동명기술공단

Ⅱ		추 진 경 위

○ '14.09.    : 구룡지하차도 개통

○ '19.12.    : 염곡동서지하차도 개통

○ '19.12.    : 염곡동서지하차도 개통

○ '20.12.    : 구룡지하차도 종점부 방음터널 완료

○ '22.03.    : 구룡지하차도 시점부 및 염곡동서지하차도 종점부 방음터널 완료

○ '22.12.29. : 과천 제2경인고속도로 갈현고가교 방음터널 화재발생

○ '23.02.08. : 국토교통부 PMMA 소재 방음터널 교체 명령

○ '23.02.09. : 방음터널 화재대비 방재대책 알림(도로시설과)

○ '23.03.08. : 염곡동서 및 구룡지하차도 방음터널 교체 계획 수립

○ '23.03.28. : 계약심사 결과 통보

○ '23.05.09. : ********************

○ '23.05.17. : ************************

Ⅲ		검 토 사 항

○ 실정보고 사유

- ****************************************************************************************

○ 고재처리 자재 상세도

*

○ 고재 수량 산출

자재명	구 간	시공수량	고재 수량산출				비 고
			단위중량	두께	시공수량	총합
PMMA 투명 방음판넬	염곡동서 종점부	*********	**********	******	*********	*********
	구룡 시점부	*********			*********	*********
	구룡 종점부	*********			*********	*********
	소 계					**********
AL 커버	염곡동서 종점부	******	*********	*	******	********
	구룡 시점부	******			******	********
	구룡 종점부	******			******	********
	소 계					********
스크류 볼트	염곡동서 종점부	********	***********	*	********	******	*********
	구룡 시점부	********			********	******
	구룡 종점부	********			********	******
	소 계					******
합 계						**********

○ 고재 처리 견적 비교검토

자재명	수 량	단위	업 체 명						비고
			*****		****		********
			**	**	**	**	**	**
투명판 (PMMA)	*******	**	***	**********	***	**********	***	**********
AL Cover	*****	**	***	*********	***	*********	***	*********
Screw Bolt(STS)	***	**	***	*******	***	*******	***	*******
계	*******	**		**********		**********		**********	*****
***			*

- ************************************

- 추후 고재처리 수량은 실제 계량 물량을 상호 비교하여 정산 예정이며 ********************************************

○ 공사비 증·감 현황

구 분	금 액(천원)			비고
	당초	변경	증․감
1. 고재처리	-	*******	*******
PMMA 방음판	-	*******	*******	********
AL Cover	-	******	******	********
Screw Bolt	-	****	****	********
직접공사비 계	-	*******	*******
V.A.T	-	******	******
도 급 액	-	*******	*******

Ⅳ		조 치 계 획

○ 상기 내용과 같이 염곡동서지하차도 종점부 및 구룡 시,종점부 방음터널 상부방음판 교체공사중 기존자재를 고재처리하여 예산절감코자 하는 책임기술인의 검토는 타당한 것으로 판단되며 추후 설계변경시 반영코자 함.

붙임 : 책임기술인 검토의견서 1부.  끝.