출 장 결 과 보 고 서

주무관		설비심사팀장	계약심사과장		결재
황문연		정대진	06/16
			代이경혜
협 조

	명에 의하여 도시기반시설본부에서 시행하는 「AI지원센터 건립 전기공사」 설계변경과 관련, 공사현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2023. 6. 16.
보고자: 직) 공업6급 성명: 황문연

보 고 내 용
일 시	2023. 6. 16.(금) 12:48 ~ 17:00
건 명	출장결과보고(6. 16.)
내용	○ 출 장 자: 공업6급 황문연 ○ 참 석 자: 김동우 감리 외 1인 ○ 출장위치: 서울특별시 서초구 태봉로 103 (AI지원센터 건립 전기공사 현장) ○ 출장목적: 계약심사(설계변경)를 위한 현장 확인 ○ 조사내용 - 설계변경 사유 및 증감내역 등 확인 ·항온, 항습기 용량 및 수량 변경에 따른 케이블 변경 ·케이블트레이 규격 변경에 따른 시공 물량 변경 ·에너지저장장치(ESS)용 배관배선 물량 변경 ·기타 구획변경에 따른 케이블 등 변경 - 변경 물량의 우선 시공 여부 확인: 미 시공 - 전체 공정률: 약 38% 붙임 현장사진 1부. 끝.

현 장 사 진

▲ 전기실 - 설계변경 대상 케이블트레이 미 시공	▲ 지하1층 - 설계변경 대상 케이블트레이 미시공