문서번호	설비부-8981
결재일자	2023. 6. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로설비과장	설비부장
김세익		곽용길	06/16
			신용휴
협 조

「로봇과학관 건립 소방공사(2차, 총차)」 준공(정산) 설계변경 검토보고

「로봇과학관 건립 소방공사(2차, 총차)」

준공(정산) 설계변경 검토보고

2023. 6.

도시기반시설본부

(설 비 부)

「로봇과학관 건립 소방공사(2차, 총차)」

준공(정산) 설계변경 검토보고

우리 본부에서 추진하고 있는 로봇과학관 건립 소방공사(총차,2차) 관련 준공(정산)요청사항에 대하여 다음과 같이 보고 드림

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 로봇과학관 건립 소방공사(2차)

ㅇ 위    치 : 도봉구 마들로 13길 80(창동 1-25)

ㅇ 규    모 : 지하2층/지상4층, 연면적 7,308㎡

ㅇ 계약현황

차수	계약금액(원)	계약기간	비고
총차	***********	2021.7.15. ~ 2023.10.21.
1차	**********	2021.7.15. ~ 2022.8.24.
2차	***********	2022.9.16. ~ 2023.6.20.	금회정산
3차	***********	2023.6.20. ~ 2023.10.21.

□ 관련근거

ㅇ「로봇과학관 건립 소방공사」설계변경 준공정산(2차) 적정성 검토보고

[KDU(대외) 제23-293호(2023.6.16.)]

□ 검토내용

ㅇ 설계변경 사유

- 2차공사 산업안전보건관리비 및 각종 보험료 등 사후정산 항목

ㅇ 계약금액 변경 내용

[단위: 원]

구분	당초	변경	증·감	비고
총차	***********	***********	-9,693,000
2차(금차)	***********	***********	-9,693,000

ㅇ 변경세부내역

- 경비(산업안전보건관리비, 퇴직공제부금비) 및 고용개선지원비 등

[단위: 원]

항 목		당초	변경	증감	비고
경비	산업안전보건관리비	2,195,799	2,010,000	-185,799
	퇴직공제부금비	1,588,492	-	-1,588,492
소계		3,784,291	2,010,000	-1,774,291
일반관리비		5,549,279	5,451,693	-97,586
이윤		15,083,879	14,796,612	-287,267
소계		20,633,158	20,248,305	-384,853
고용개선지원비	주휴수당	4,931,234	-	-4,931,234
	국민연금, 건강보험지원분	1,369,211	-	-1,369,211
	고용개선장려금	352,230	-	-352,230
소계		6,652,675	-	-6,652,675
부가가치세		12,818,181	11,937,000	-881,181
합계		43,888,305	34,195,305	-9,693,000

ㅇ 건설사업관리단 검토의견

- 로봇과학관 건립 소방공사의 2차수에 대한 설계변경 준공 정산내역서 등을 검토한 결과 시공사인 ㈜선진콘트롤엔엑세스로부터 제출된 설계변경 준공정산이 적정한 것으로 사료됨

□ 보고자의견

ㅇ 건설사업관리단의 실정보고 내용이 적정하다고 판단되어 승인하고, 계약부서(총무부)에 변경계약을 의뢰하고자 함

붙임  건설사업관리단 검토보고 1부.  끝.