문서번호	급수운영과-10918
결재일자	2023. 6. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장		강서수도사업소장
정원형	김영환	성기선		06/19
				代이영미
협 조	시설관리과장		代김형식
	시설운영팀장		代한규수
	시설관리팀장		정수용
	급수운영팀장		이연창
	주무관		천재호
	주무관		손현정

'23년 대형 상수도관 세척사업 추진계획

2023. 6.

강서수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

'23년 대형 상수도관 세척사업 추진 계획

장기사용 및 수계전환 등으로 혼탁수 발생이 우려되는 대형 상수도관(D400㎜ 이상)에 대한 선제적 세척으로 깨끗한 수돗물을 공급하고자 함.

※ 2023년 대형 상수도관 세척 추진계획 알림[본부 급수운영과-39298('22.12.27)]

Ⅰ		관련 근거

□ 수도법 개정 시행('21.4.1.)

ㅇ 수도법 제21조의 2(상수도 관망의 관리) 및 시행령 제34조의 3

(상수도 관망관리에 관한 업무)

ㅇ 상수도관망시설 유지관리업무 세부기준(환경부고시 제2021-43호)

제4조(상수도관망시설의 운영 및 유지관리계획 수립)

② 제1항제1호에  따른 관세척은 송수 및 배수관로에 대해 최초 매설 후 매10년이내 1회      이상 시행해야 한다.

□ '23년 대형 상수도관 세척사업 추진계획(본부 급수운영과-27703호)

Ⅱ		'23년 세척사업 개요

□ 대형 상수도관(400㎜이상) 세척대상 선정기준

ㅇ 기본방향 : 대형관을 3단계로 구분하여 10개년간 계획 수립(본부)

- 1단계('22년~'25년), 2단계('26년~'30년), 3단계('31년이후)

ㅇ 사업 우선순위를 고려하여 취약관로를 대상으로 1단계 우선 시행

- 저유속관로(0.1m/sec), 수질민원 발생비율, 비내식성 밸브비율 등 사업우선 순위 고려요소를 반영하여 우선 대상 선정

□ 세척구간 현황

ㅇ **************************

- 구별 : 양천구 3개소, 강서구 4개소

ㅇ 세척대상 관로현황

**	*****	****	****	***	**
	*************************
*	********* ***********	****** ******	****	****	*****
*	********* **********	***** ******	****	****
*	********** **********	********** ******	****	****
*	****** *******	*************	****	****	*****
*	******** ********	*****************	****	****
*	******* ********	****** ******	****	****
*	******** **********	****** ******	****	****

Ⅲ		추진 경과

ㅇ 본부 대형관 세척 발주 및 용역체결            : '23. 2.~ 3.

ㅇ 본부, 사업소 세척구간 합동조사(1차)           : '23. 3.~ 4.

ㅇ 세척구간 변경 검토 요청                     : '23. 5. 2.

- 양천구(1구간) : D500㎜, L=740m(1구간) → D500~700㎜, L=720m(1구간)

- 강서구(2구간) : D600~700㎜, L=2,970m(2구간) → D400~600㎜ L=2,940m(4구간)

ㅇ 본부, 사업소 세척구간 합동조사(2차)          : '23. 5. 7.

ㅇ 세척구간 변경 검토 결과 통보                 : '23. 5.31.

Ⅳ		추진 절차

□ 세척 추진절차

ㅇ 공사·용역 분리 시행

- 본  부 : 세척 용역 발주 및 세척 시행 등 전반적인 사업관리

- 사업소 : 수계전환(밸브조절 포함) 및 작업구 설치공사 등

ㅇ 세척작업 세부절차

계 획			착 수									준 공
본 부			본 부			사업소			용역사			본 부
		‣			‣			‣			‣
·사업계획수립 ·용역 발주			·추진일정 점검 ·용역 추진 관련 업무			·수계전환, 단수 ·작업구 설치 ·시편채취			·세척계획서 작성 ·세척시행 ·완료보고			·결과 보고 ·용역 준공

ㅇ 세척 추진방법 (세척 작업구 단면도(예시))

□ 추진일정

ㅇ 수계전환 및 작업구 설치 작업(사업소) : '23. 6. ~ 9.

ㅇ 관세척 시행(용역사) : '23. 7. ~ 10.

ㅇ 세척사업 완료 : '23. 11. ~ 12.

Ⅴ		행정사항

ㅇ 23년 대형 상수도관 세척사업 추진계획서 본부 급수운영과 제출

ㅇ 세척작업 구간 사전작업 준비 철저(작업구 설치 및 자재 확보,도로굴착 협의, 단수 홍보 등)

붙임 : 대형 상수도관 세척 관리카드 각1부.  끝.