문서번호	시설관리과-14227
결재일자	2023. 6. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장	중부수도사업소장
김병주	이유찬	이동욱	06/19
			代은정호
협 조
	행정지원과장		은정호
	주무관		정은희

준공기한 연기(3차) 검토보고(2022년 종로 장기사용 송배수관 정비공사)

「2022년 종로 장기사용 송배수관 정비공사」

준공기한 연기(3차) 검토보고

2023.  6. 19. (월)

중부수도사업소

(시설관리과)

「2022년 종로 장기사용 송배수관 정비공사」

준공기한 연기(3차) 검토보고

「2022년 종로 장기사용 송배수관 정비공사」와 관련하여 감독청인 서울시설공단에서 제출한 준공기한 연기 보고서에 대한 검토 보고드림

□ 관련문서

ㅇ 서울시설공단 공사감독2처-6288(2023.6.16.)호

- 준공기한 연기 검토보고서 제출(종로 장기사용 송배수관)

□ 공사현황

ㅇ 공 사 명: 2022년 종로 장기사용 송배수관 정비공사

ㅇ 공사개요: 상수관로 부설 D=200~700mm, L=842m

ㅇ 공사위치: 종로구 종로5가역 ~ 동대문역간

ㅇ 공사기간: 2022. 8. 17. ~ 2023. 6. 19.

ㅇ 계약금액: 금848,247,500원

ㅇ 계 약 자: (주)적중건설 대표 장호철

ㅇ 감 독 처: 서울시설공단 공사감독2처 김유승

□ 공사진행 현황

ㅇ 공 정 율: 98% (2023. 6. 현재)

ㅇ 완료공정: 전체 배관 및 변실 설치완료

ㅇ 잔여공정: 폐쇄관 충진작업구 철거

***********

*****************

************************

*********************************************************************

*******************************************************

*************

*************************************

************************************

******

************

*****************************************************************************

*********

**************************************

************

******************

****************************************

***************************************

*****************

□ 조치계획

ㅇ 검토결과 준공기한 연기 사유가 타당하므로 준공기한 변경 시행하고 그 결과를 공단으로 회신하고자 함.

붙임  준공기한 연기요청 관련서류 1부.  끝.