문서번호	시설관리과-14244
결재일자	2023. 6. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
최덕환		유세종	06/19
			이동욱
협 조

설계변경(3차,최종) 심의 위원회 개최결과 보고

(2022년 종로,성북구 관내 상수도시설물설치 및 보수공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 6.

중부수도사업소

시설관리과

설계 변경 심의자료

가. 공사명 : 2022년 종로,성북구 관내 상수도시설물설치및 보수공사(장기계속단가계약)

나. 제  목 : 설계 변경 심의(*****)

다. 일  시 : 2023.****************

라. 참석자 : ****************************

******************.

마. 공사개요

공종	단위	당초	변경	증,감
*******	**	***	**	감****
******	**	***	***	증***
*****	**	**	**	-
************	*	*	*	-

바. 공사기간 : 2022.6.15. ~ 2023.06.30

사. 공사 금액 현황

(금액 단위: 원)

구 분	설계 변경 현황			비고
	당 초	변 경	증 ․ 감
도 급 비	*************	*********,000	*)1******

아. 설계변경 심의내용 : 아래 첨부

설계 변경 심의내용

1. 공사 현황

가. 공사명 : *****************상수도시설물설치 및 보수공사(장기계속단가계약)

나. 공사개요

공종	단위	당초	변경	증,감
*******	개소	***	**	*****
******	개소	***	***	****
*****	개소	**	**	**
************	식	*	*	*

다. 공사기간 : 2022*****************30

라. 수 급 인 : **************

2. 설계 변경 사유

가. 공사중 물량 증.감 사항 발생

- 물량 증가:*****************************************

- 물량 감소: ************************************

나. 신공종 발생

- 신규공종 :  강관**************************

3. 설계변경 검토결과

가. 도급액 **********

나. 신공종에 대해 *******

붙 임: 1) 설계변경 심의의결서 1부.

2) 변경내역서 1부. 끝.