문서번호	방재시설부-7196
결재일자	2023. 6. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
김광호		정현중	06/19
			이동훈
협 조
	주무관			김재웅

- 국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설공사 -

복공판 품질관리(시험) 시행 보고

2023. 6.

도시기반시설본부

(방재시설부)

- 국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설공사 -

복공판 품질관리(시험) 시행 보고

「건설공사 품질관리 업무지침」개정 사항중 복공판 시험 의무화에 따라 기 수립된 품질관리계획을 보완하고, 복공판 품질시험을 정기적으로 시행하여 공사장 품질 및 안전관리에 만전을 기하고자 함

※ 관련문서 : 이산 국회 2023-156호(2023.06.16.) 실정보고건

1		추진근거

ㅇ 건설공사 품질관리 업무지침(국토교통부 고시 제2017-450호)

ㅇ *******************************************

ㅇ 품질관리계획서 보완 반영(건설사업관리단, 2023. 6. 1.)

2		공사개요

ㅇ 공 사 명 : 국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설공사

ㅇ 위    치 : 양천구 신월IC ~ 화곡 지하차도 BOX 시점

ㅇ 사업규모 : 도로연장 1.22km, 왕복4차로 (지하차도 신설 995m)

ㅇ 공사기간 : 2018. 8. 8. ~ 2024. 12. 31. (착공일로부터 77개월)

ㅇ 도 급 비 : 91,827백만원

ㅇ 시 공 사 : 한신공영(주) 외 1개사

ㅇ 건설사업관리단 : ㈜이산 외 3개사

3		추진현황

ㅇ '****************************************

******************************************

ㅇ ******************************************

ㅇ ‘23.06.01. : 품질관리계획서 보완 시행(복공판 시험 계획 포함)

- 복공판(가설기자재) 품질관리계획에 포함   * 검사·시험 및 모니터링 관리 등

ㅇ ‘23.06.09. : 품질관리계획 이행실태 점검계획서 승인(도기본 → 건설사업관리단)

ㅇ ‘23.06.14. : 복공판 품질시험 시행 승인요청(건설사업관리단 → 도기본)

4		복공판 품질관리 검토

□ 품질관리 업무지침(국토교통부 고시 제2017-450호)

종 별	시험종목	시험방법	시험빈도	비고
복공판	외관상태 및 성능	공사시방서에 따름	· 제품규격별 200개 마다 ※ 단, 200개 미만은 1회 · 설치후 1년이내 마다

□ 품질시험 계획

ㅇ 품질시험 대상 물량

구 간	품질시험 산정	수 량	비고
중첩구간	품질시험 대상 복공판(200개당/1회) 7,005장 / 200장 = 36장	복공판(교체) : 108장 수량 : 36장 x 3회(1회/1년) = 108장
잔여구간	품질시험 대상 복공판(200개당/1회) 6,311장 / 200장 = 32장	복공판(교체) : 96장 수량 : 32장 x 3회(1회/1년) = 96장
합 계	중첩구간 + 잔여구간	복공판(교체) : 204장

ㅇ 시험기관에 따른 시험비용 비교                 (단위 : 만원/장, 부가세 포함)

구 분		시 험 비 용			비고
****		***** *****	***** *****	**** *****
***	*****	*****	***	*****
	***** *****	*****	***	*****	**** *****
***		*

※ 서울시 품질시험소는 복공판 자재 시험을 시행하지 않음

ㅇ 공사비 (품질시험비용) 증·감 현황

구 분	공사비	비고
○ 복공판 설치, 철거 30,208원 x 408 M2 = 12,325,000원	12,325,000	기존단가 적용 (단순수량증감)
○ 복공판 자재 (소모) 453,995원 x 204장 = 92,615,000원	92,615,000	기존단가 적용 (단순수량증감)
○ 복공판 품질시험 1,155,000(품질시험비) x 184장 = 212,520,000원 1,485,000(품질시험비(입회시) X 20장 = 29,700,000원	242,220,000	실비정산
합 계	347,160,000

5		조치계획

ㅇ 서울시 품질시험소는 복공판 품질시험을 시행하지 않아, 시험비용이 상대적으로

****************************

ㅇ 품질시험 비용은 도급비에 포함하여 정산하되, 복공판 자재 및 설치·철거비는

계약단가(낙찰율)를 적용하고, 시험비용은 실비정산코자 합니다.

붙임 :  감리 실정보고서 1부.  끝.