아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	설계변경(1차) 시행 - 욱천복개1구간 정밀안전진단 및 금화터널 외 4개소 정밀안전점검 및 실태조사용역

1. 시설보수과-5573(2023. 6. 19.) 『욱천복개1구간 정밀안전진단 및 금화터널 외 4개소 정밀안전점검 및 실태조사용역 설계변경(1회) 검토 보고』)호와 관련입니다.

2. 우리 과에서 시행 중인 용역 관련하여 아래와 같이 설계변경(1회)을 시행하고자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명: 욱천복개1구간 정밀안전진단 및 금화터널 외 4개소 정밀안전점검 및 실태조사용역

나. 용역기간: 2023. 4. 4. ~ 2024. 4.. 2.

다. 도 급 자: 에스큐엔지니어링(주) 대표 이래철,  ㈜만금엔지니어링 대표 최용훈

라. 설계변경 내역

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감
용역비	계	508,367,000	659,188,000	증) 150,821,000
	공급가액	462,151,818	599,261,818	증) 137,110,000
	부가가치세	46,215,182	59,926,182	증) 13,711,000

마. 설계변경 사유

- 『소규모(3종·비법정) 도로시설물 긴급 안전진단 관련』재난관리기금 예산 재배정에 따른 사천교, 남산육교 정밀안전진단 및 실태조사 기 추진용역에 과업 추가

바. 예산과목

- 안전총괄과, 재해 및 재난 예방, 재난 예방 및 복구, 재난예방(재난관리기금재난계정), 시설비 및 부대비, 시설비

붙임  1. 관련 방침서 1부.

2. 설계(변경)내역서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	시 설 보 수 과 장
주무관	김전수		주무관	정병구		시설보수과장	06/19
안준수
협조자
시행	시설보수과-5592	(	2023. 6. 19.	)	접수		(		)
우	03918	서울특별시 마포구 가양대로 203, 서부도로사업소 시설보수과 (상암동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-300-8375	/전송	02-300-8384	/	kjsoo6101@hanmail.net	/	부분공개(5)