문서번호	설비부-9072
결재일자	2023. 6. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로설비과장	설비부장
김세익		곽용길	06/19
			신용휴
협 조

「로봇과학관 건립 기계설비공사(2차, 총차)」 준공(정산) 설계변경 검토보고

「로봇과학관 건립 기계설비공사(2차, 총차)」

준공(정산) 설계변경 검토보고

2023. 6.

도시기반시설본부

(설 비 부)

「로봇과학관 건립 기계설비공사(2차, 총차)」

준공(정산) 설계변경 검토보고

우리 본부에서 추진하고 있는 로봇과학관 건립 기계설비공사(총차,2차) 관련 준공(정산)요청사항에 대하여 다음과 같이 보고 드림

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 로봇과학관 건립 기계설비공사(총차,2차)

ㅇ 위    치 : 도봉구 마들로 13길 80(창동 1-25)

ㅇ 규    모 : 지하2층/지상4층, 연면적 7,308㎡

ㅇ 계약현황

차수	계약금액(원)	계약기간	비고
총차	1,970,149,750	2021.7.15. ~ 2023.10.21.
1차	27,500,000	2021.10.20. ~ 2022.8.24.
2차	600,000,000	2022.9.19. ~ 2023.6.20.	금회정산
3차	1,342,649,750	2023.6.20. ~ 2023.10.21.

□ 관련근거

ㅇ「로봇과학관 건립 기계공사」설계변경 준공정산 적정성 검토보고

[KDU(대외) 제23-294호(2023.6.16.)]

□ 검토내용

ㅇ 설계변경 사유

- 2차공사 산업안전보건관리비 및 각종 보험료 등 사후정산 항목

ㅇ 계약금액 변경 내용

[단위: 원]

구분	당초	변경	증·감	비고
총차	1,970,149,750	1,925,098,750	-45,051,000
2차(금차)	600,000,000	554,949,000	-45,051,000

ㅇ 변경세부내역

- 경비(산업안전보건관리비, 퇴직공제부금비) 및 고용개선지원비 등

[단위: 원]

항 목		당초	변경	증감	비고
경비	건강보험료	12,384,347	3,392,420	-8,991,927
	연금보험료	16,373,686	2,590,550	-13,783,136
	노인장기요양보험료	1,426,676	390,806	-1,035,870
	산업안전보건관리비	16,277,523	12,519,000	-3,758,523
	건설기계대여금 보증 수수료	598,723	-	-598,723
	퇴직공제부금비	8,450,955	3,347,500	-5,103,455
소계		55,511,910	22,240,276	-33,271,634
일반관리비		25,730,721	23,900,781	-1,829,940
이윤		51,892,523	46,039,078	-5,853,445
소계		77,623,244	69,939,859	-7,683,385
부가가치세		54,545,455	50,449,953	-4,095,503
합계		187,680,609	142,630,088	-45,051,000	백단위절사

ㅇ 건설사업관리단 검토의견

- 로봇과학관 건립 기계설비공사의 2차수에 대한 설계변경 준공 정산내역서 등을 검토한 결과 시공사인 ㈜기술환경으로부터 제출된 설계변경 준공정산이 적정한 것으로 사료됨

□ 보고자의견

ㅇ 건설사업관리단의 실정보고 내용이 적정하다고 판단되어 승인하고, 계약부서(총무부)에 변경계약을 의뢰하고자 함

붙임  건설사업관리단 검토보고 1부.  끝.