젊은경제·바른행정·신속성장, 바로 서대문!
		서 대 문 구
수신자		내부결재
(경유)
제목	용역변경계약 시행(전체3회 2차2회) [독립문 문화공원 지하공영주차장 건립 공사 건설폐기물 처리용역]

우리구에서 시행중인『독립문 문화공원 지하공영주차장 건립 공사 건설폐기물 처리용역』 용역변경계약(전체3회 2차2회)을 아래와 같이 시행코자 합니다.

가. 용 역 명 : 독립문 문화공원 지하공영주차장 건립 공사 건설폐기물 처리용역

나. 용역기간 : 전체-2021.12.23. ~ 2023.12.26.

2차-2022.12.12. ~ 2023.12.26.

다. 변경사유 : 설계시 미 확인된 지하구조물 및 매립폐기물 추가발생

라. 예산과목 : 주차교통과, 주차질서 확립 및 주차난 해소, 주차장 확충 및 야간개방, 영천시장(독립문어린이공원) 지하주차장 조성, 시설비및부대비, 시설비(특별교부금-명시이월)

□ 변경계약(전체3회 2차2회)

○ 폐기물 계역용역 증·감 내역

(단위 : 원)

구 분			변경 전	변경 후	증 · 감
전체 (3회)	총용역비		583,488,000	915,500,000	(증) 332,012,000
	도급비	공급가액	530,443,742	832,272,728	(증) 301,828,986
		부가가치세	53,044,375	83,227,272	(증) 30,182,897
		소계	583,488,000	915,500,000	(증) 332,012,000
2차 (2회)	총용역비		354,528,000	686,540,000	(증) 332,012,000
	도급비	공급가액	322,298,287	624,127,273	(증) 301,828,986
		부가가치세	32,229,830	62,412,727	(증) 30,182,897
		소계	354,528,000	686,540,000	(증) 332,012,000

붙임  1) 건설폐기물 처리용역 설계변경 검토보고 1부.

2) 관련 검토보고서 각 1부.

3) 건설폐기물 처리용역 설계변경 요청 1부.

4) 변경 내역서 각1부.

5) 합의각서 1부.  끝.

주무관	표경춘		도로계획팀장	양규철		도로과장	강우균		안전건설국장	06/19
김태중
협조자	주무관	심영우		주무관	양지숙		계약팀장	문혜선
재무과장	하인철		기획재정국장	강환복
시행	도로과-13680	(	2023. 6. 19.	)	접수		(		)
우	03718	서울특별시 서대문구 연희로 248, 4층 도로과	/	https://www.sdm.go.kr
전화	02-330-1764	/전송	02-330-1615	/이메일	chun1220@sdm.go.kr	/	부분공개(5)