문서번호	치수과-4050
결재일자	2023. 6. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
박지수		김수영	06/20
			김종호
협조

- 잠실수중보 보수·보강공사(2차) -

실정보고에 대한 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 6.

한강사업본부

(시설부)

- 잠실수중보 보수·보강공사(2차) -

실정보고에 대한 검토 보고

「잠실수중보 보수·보강공사(2차)」관련 건설사업관리자 실정보고 사항(레미콘 사급 자재 전환)에 대하여 검토하여 처리계획을 보고 드림

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 잠실수중보 보수‧보강공사(2차)

ㅇ 위    치 : 서울시 광진구 자양동 307(잠실대교 주변)

ㅇ 공사기간 : '22. 2. 23. ~ '23. 7. 31.

ㅇ 공사규모

- 세굴 방지공 설치 및 감세공 보강 : 4,028㎥

- 콘크리트 단면복구 1,778㎡, 균열보수 203m

ㅇ 공사비(2차) : 5,828백만원

- 도급비 5,167백만원, 관급비 364백만원, 이설비 297백만원

ㅇ 시 공 사 : 우륭건설(주) 대표 최부영

ㅇ 감 리 사 : ㈜서영엔지니어링 외 1개사 대표 김종흔

□ 추진경위

ㅇ '22.  2. 23. : 착공(2차분)

ㅇ '22. 12. 28. : 가물막이 설치 완료

ㅇ '23.  1. 12. : 양수 작업 완료

ㅇ '23.  3.  2. : 물받이 및 바닥보호공 계획 변경

ㅇ '23.  3. 27. : 레미콘 우선 공급 요청(한강사업본부→조달청)

ㅇ '23.  5. 30. : 실정보고 제출(시공사→건설사업관리단)

ㅇ '23.  5. 31. : 실정보고 검토의견서 제출(건설사업관리단→치수과)

□ 보고내용

ㅇ 관급 레미콘 수급 부족분 사급 자재로 전환 필요

- 감세공 기초 및 물받이공 설치를 위해 관급 레미콘 5,771㎥ 타설이 계획되어 있음

‣ 레미콘 타설 물량

구 분	버림 콘크리트 (25-18-150)	무근 콘크리트 (25-21-150)	철근 콘크리트 (25-27-150)	비 고
관 급	360㎥	1,055㎥	4,356㎥

- 가물막이 내에서 시행하는 현장 특성상 홍수기 전 공사를 완료해야 하나, 봄철 레미콘 수급 불안으로 정상적인 공사 추진이 어려워 공기 지연에 따른 안전사고가 우려되는 실정임

- 상기와 같은 실정으로 관급 레미콘 수급이 곤란한 물량을 사급자재로 전환하여 홍수기 전 공사를 완료하고자 함

‣ 사급자재 전환 물량

구 분	버림 콘크리트 (25-18-150)	무근 콘크리트 (25-21-150)	철근 콘크리트 (25-27-150)	비 고
사 급	180㎥	90㎥	2,328㎥
관 급	180㎥	965㎥	2,028㎥
계	360㎥	1,055㎥	4,356㎥

‣ 적용단가 검토(부가세 별도)                            (단위 : 원)

구 분	적용단가	견적 금액			시장물가
		우림레미콘	성은산업	유진레미콘	물가자료	물가정보	유통물가
버림 콘크리트 (25-18-150)	88,360	88,360	103,400	89,400	85,756	88,360	93,470
무근 콘크리트 (25-21-150)	87,200	87,200	-	90,200	89,100	93,980	101,500
철근 콘크리트 (25-27-150)	105,000	105,000	117,200	105,000	97,218	105,100	116,750
※ 현장 적기 공급이 곤란한 물가자료 단가 미적용

ㅇ 공사비 증·감 현황                                      (단위 : 원)

공 종	당 초	변 경	증․ 감		비 고
공 급 가 액	12,200,000	265,000,000	감)	252,800,000
부 가 가 치 세	1,200,000	26,500,000	감)	25,280,000
도 급 액	13,420,000	291,500,000	증)	278,080,000
관 급 자 재 비	560,590,030	336,044,230	감)	224,545,800
총 공 사 비	574,010,030	627,544,230	증)	53,534,200

□ 검토의견

ㅇ 건설사업관리단 의견

- 관급자재(레미콘) 수급 곤란에 대하여 적정하게 조치하였다고 판단되며 추후 설계변경에 반영함이 타당하다고 사료됨

ㅇ 주관부서 의견

- 홍수기 전 공사 완료를 위해 관급 수급이 곤란한 수량을 사급 자재로 전환함이 타당하다고 판단되어 우선 시공토록 하고자 하며, 추후 설계변경시 반영코자 함

□ 조치계획

ㅇ 실정보고 승인 통보(치수과→건설사업관리단)

ㅇ 물량 증‧감 사항을 반영하여 추후 설계변경 시행

붙임 : 1. 건설사업관리단 검토의견서 1부.  끝.

2. 관련공문 1부.