문서번호	급수운영과-9872
결재일자	2023. 6. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
서동민	서규석	06/20
		이용구
협 조

설계변경(제2회-최종) 검토 보고

(2022년 대학동 외 10개동 상수도공사)

2023.  06. 20.(화)

남부수도사업소

(급수운영과)

설계변경(제2회-최종) 검토 보고

「2022년 대학동 외 10개동 상수도공사」시행 중 현장여건에 따라 신규공종 및 계약물량 증․감이 발생되어 설계변경을 시행하여 공사업무에 만전을 기하고자 함

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 2022년 대학동 외 10개동 상수도공사(장기계속단가)

ㅇ 공사기간 : 2022. 07. 04. ~ 2023. 06. 30.

ㅇ 도 급 액 : *************

ㅇ 공사개요 : ********************

ㅇ 도 급 자 : (주)금하수도 대표 정영군

□ 설계변경 근거 및 사유

ㅇ 지방계약법 시행령 제74조(설계 변경으로 인한 계약금액의 조정)

- 제1항 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 공사계약에서 설계 변경으로 인하여 공사량이 증감이 발생하였을 때에는 『지방계약법 제22조 제1항』에 따라 해당 계약금액을 조정한다.

ㅇ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준

- 제13장 공사계약 일반조건“6(공사설계의변경)-1(설계변경)-다”의 규정

ㅇ 공사현장 상태와 설계서 상이로 인한 실정보고에 따른 승인사항

□ 설계변경 금액 : 증액(최초계약 대비 9.5%증액)

******************************************************************************************************************************************************************************

□ 설계변경 공사개요

구 분	당 초(최초 계약)	변 경(2회 설계변경)
공사개요	D=15~300mm, L=1,304m	D=15~300mm, L=1,658m

ㅇ 공사 시행중 현장여건 변동에 따른 신규공종 발생 및 물량변동(증 ․ 감)

- 물량증가 : 아스팔트 포장절단 200mm 이하,지세 외 216개 공종

- 물량감소 : 콘크리트 포장절단 200mm,이하,지세 외 319개 공종

- 신규자재 : 누수방지대 D=150/80mm 외 5개 자재

- 신규공종 : 계량기 교체공 15mm 외 30개 공종

□ 계약금액조정 검증결과 : 적정

ㅇ 계약금액조정 검증시스템에 입력하여 확인결과 최초계약에 따른 요율을 상한초과한 항목 없이 적정함.

□ 조치계획

ㅇ 위와 같이 주요 설계변경 사유로 인하여 계약금액이 초과되었으며, 본부 안전조사과에 계약금액조정 심사 의뢰한 후 그 결과에 따라 설계변경을 시행하고자 함.

붙임  1. 설계변경 내역서 1부.

2. 계약금액조정 검증확인서 1부.  끝.