문서번호	도시철도설비부-5945
결재일자	2023. 6. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	신호과장	도시철도설비부장		도시철도국장
강신영	조준규	전계목		06/20
				임창수
협 조

별내선(8호선 연장) 건설사업     암사역 개량구간 사용 개시 계획

2023. 6.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

별내선(8호선 연장) 건설사업         암사역 개량구간 사용 개시 계획

별내선(8호선 연장) 건설사업의 일환인 암사역 신호기계실 신호시스템 개량에 따라 연동검사 등 개량시설물 사용 개시 계획을 보고 드림.

□ 관련근거

ㅇ 철도종합시험운행 시행지침[별표6](종합시험운행을 단축하거나 생략할 수 있는 범위)

*****************************************

□ 추진개요

ㅇ 목적

- 암사역 신호기계실의 제어범위는 별내선 신설구간 500m 지점까지로 개량시설물 사용을 위해서는 철도안전법, 철도종합시험운행 시행지침 등 관련법령에 따라 철도종합시험운행을 실시하여야 함

ㅇ 추진방법

- 기존 영업운전 구간이 포함되어 있어 주간에는 종합시험운행이 불가하기에 시험대상을 1단계 구간(기존 영업구간)과 2단계 구간(천호역 방향 제어범위~신설구간 0k500)으로 구분하여 시행

- 1단계 구간은 철도종합시험운행 시행지침 별표6 및 첨부 회의록의 결과에 따라, 철도시설관리자와 철도시설운영자 합동으로 시험 실시 후 사용개시 하여 별내선 적기개통에 지장이 없도록 조치

□ 추진 현황

ㅇ '20.2.25.          : "별내선(8호선연장) 신호시스템(본선 및 차량기지) 제작구매 설치" 계약

ㅇ '20.2.25.~'23.4.30: 암사역 시스템 개량 및 시설물 간 설정치 조정

ㅇ '23.5.1.~5.31.    : 시설물 간 통신상태 검사, 자체 연동검사

ㅇ '23.6.1.~6.16.    : 미비상태 점검 및 보완

□ 연동검사 계획

ㅇ '23.6.21.~6.23.(23:00~익일 05:00): 연동검사 실시

- 세부 시험일정

작업 일자	세부 내용	비 고
1일차	선로전환기 5개소, 신호기 10개소 동작시험	상, 하선
2일차	연동도표에 따른 진로 16개소 연동검사	상, 하선
3일차	미비 개소 재시험

- 시험인력

▶ 총  괄: 신호 책임감리원 양윤석 외 1명

▶ 입회자: 서울교통공사

▶ 시험자: 시스템 제작사[대아티아이㈜], 공사 시공사[종합전기㈜]

- 검사 항목

▶ 신호 제어 및 진로 시험

▶ 진로쇄정 등 각종 쇄정 시험

▶ 상호쇄정 등 대향 진로 조건 시험

▶ 선로전환기 전환 및 불일치 시험

▶ 궤도회로 단락 시험

※ 시험 일정은 현장 여건에 따라 변동될 수 있음

ㅇ '23.7.3.~7.31.(예정): 시험열차 운행, 신 시스템 사용 개시, 현장 신구 시설물 절체

□ 향후계획

ㅇ 암사역 개량구간 기존 궤도회로 시설물 철거: '23. 8.~10.

ㅇ 별내선 철도종합시험운행 실시           : '23. 7. 4.~'24.6.30.

붙임  **********************************

*****************************

3. 철도종합시험운행 시행지침[별표6].  끝.