문서번호	급수운영과-11042
결재일자	2023. 6. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장	강서수도사업소장
노병권	이연창	代이연창	06/20
			代이영미
협 조

설계변경 검토보고(2022년 구로구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사) -제2회

2022. 06.

강서수도사업소

(급수운영과)

「2022년 구로구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사」

설계변경(제2회-최종) 검토 보고

『2022년 구로구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(장기계속단가계약)』업무수행 중 현장 시공여건 변화에 따른 공종별 물량 증•감이 발생함에 따라 설계변경 계약 및 공사시행에 만전을 기하고자 합니다.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2022년 구로구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사

(장기계속단가계약)

○ 공사개요********

********************************************

********************************************

************************

********************************************

********************************************

○ 계약기간 : `22. 06 .24 ~`23. 06. 30.

○ 도 급 자 : **************

○ 공사금액(도급액) : **************

□ 설계변경 근거

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 법률 시행령 제74조

(설계변경으로 인한 계약금액 조정)

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(예규 제21호)

(제13장 공사계약 일반조건)

□ 설계변경 사유

○ 공사 시행중 현장 시공여건 변화로 인한 물량변동(증•감) 발생

- 라******************************

-*******************************

□ 설계변경 및 차수별 금액변경 내역                (단위:원)

구분	당 초	변 경	증ㆍ감 액	비 고
*******	***********	***********	***********
*********	**********	**********	**********
*****	***********	***********	***********	*******

□ 행정사항

○ 설계변경 심의위원회 개최 후 설계변경계약 추진

- 상기 설계변경(연간단가)건에 대하여 우리사업소 자체 설계변경 심의위원회를 개최하여 심의결과에 따라 설계변경 계약 등을 추진하고자 함.

붙 임 : 설계변경내역서 1부.  끝.