문서번호	수상시설과-3231
결재일자	2023. 6. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		수상시설과장	수상사업부장
이이용		권혁제	06/21
			代김영호
협 조
	수상관광레저과장			박인수

- 서울 수상레포츠 통합센터 육상1 계류장 정비공사 -

설계변경 및 정산 검토 보고

2023. 6.

한강사업본부

(수상시설과)

- 서울 수상레포츠 통합센터 육상1 계류장 정비공사 -

설계변경 및 정산 검토 보고

『서울 수상레포츠 통합센터 육상1계류장 정비공사』 관련 신규공종 및 물량 증·감, 제경비 정산 등에 따른 설계변경(정산)을 검토하고 결과를 보고드림

1		사업개요

사 업 명 : 서울 수상레포츠 통합센터 육상1계류장 정비공사

위    치 : 마포구 한강난지로 162 주변(월드컵대교 하류 200m 지점)

공사규모 : 보도블럭포장 22.9a, 보관대 2개 설치 등

공사기간 : 2023. 4. 18 ~ 7. 16

공사금액 : 170백만원 (도급비 87,456,600원, 관급비 69,890,000원, 이전비 12,653,400원)

2		설계변경 검토

변경 사유 및 검토내용

① 신규공종 발생

- 보도블럭 포장 공사 구배조정(T=8cm 인상)에 따른 변경

• 상수도맨홀(￠648) 인상 : 1개소

- 메시휀스 철거 및 폐기물 처리에 따른 변경

• 메시휀스 철거 193m 및 폐기물 처리 1식 등

- 수상레져기구 보관대 제작에 따른 변경

• 당초 보관대는 콘테이너 구매 및 설치하는 것으로 계약하였으나 수상

레져기구 이용에 어려움 등으로 보관대 제작(2개소) 및 설치

② 정산에 따른 시공물량 증·감

공 종	단위	당초	변경	증·감
무근콘크리트 깨기(BH04)	㎥	38.4	42.3	증 3.9
토사절취(BH04)	㎥	7.68	0	감 7.68
토사 되메우기(BH04)	㎥	0	5.64	증 5,64
보관대 제작	개	0	2	증 2
콘크리트 포장	㎥	2.88	0	감 2.88
보도블럭포장(T=6~8cm)	a	19.06	17.86	감 1.2
보행안전도우미	HR	320	88	감 231

③ 제경비 정산에 따른 감액

- 건강보험료, 노인장기요양보험료, 연금보험료, 산업안전보건

관리비, 퇴직공제부금, 환경보전비 등 정산에 따른 변경

3		변경 총괄 및 검토의견

설계변경 총괄

구 분	당초금액	변경금액	증 · 감	비 고
총공사비	170,000,000	146,054,340	감 23,945,660
도 급 비	87,456,600	76,170,000	감 11,286,600
관 급 비	69,890,000	69,884,340	감 5,660
이 전 비	12,653,400	0	감 12,653,400

검토의견

❍ 상기 검토내용과 같이 신규공종 발생 및 시공물량 증·감, 제경비      정산 등을 반영하여 설계변경(정산) 시행하고자 함

4		행정 사항

공사준공 시(육상1 계류장) 관리부서와 인수인계 추진

❍ 준검검사 시 유지관리 부서(수상관광레저과)와 합동검사 추진

❍ 준공검사 완료 후 인수인계 시행

붙임 : 1. 설계변경(정산)내역서 1부.

2. 제비율 검증결과 1부.  끝.