등록번호

도로과-13879

주무관

도로조명팀장

도로과장

안전건설국장

등록일자

허병규

편신범

강우균

06/21

결재일자

2023. 6. 21.

공개구분

부분공개(5)

김태중

협  조

2024년도 노후 도로조명시설 개량사업 추진계획

서 대 문 구

도 로 과

2024년 노후 도로조명시설 개량사업 추진계획

2024년도 노후 도로조명시설 개량사업 서울시 예산 편성과 관련하여 우리 구 사업대상지 추진계획을 수립하여 전기안전사고를 예방하고 에너지 절약에 기여하고자 함

Ⅰ		관련근거

○ 2024년도 노후 도로조명시설 개량사업 예산편성 수요조사

[서울시 도로시설과-7810호(2023.06.01.)]

Ⅱ		시설현황

○ 가로등[55개노선 총 5,994등(시도 13노선 3,707등, 구도 42노선 2,287등)]

(단위 : 등)

구 분	합 계	세부시설현황			비 고
		차도등	보행등	기타(육교등)
가로등	5,994	3,812	2,111	71

Ⅲ		개량사업 우선순위

○ 15년 이상 경과한 3선 2회로 선로 구간

○ 보도공사 등 굴착공사 병행구간으로 15년 이상 경과한 선로

○ 10년 이상 경과한 주간선 도로의 조명시설로서 KS기준에 의거 개선이 필요한 구간

○ 향후 스마트 가로등 추진을 위한 가로등주 상시전원 공급(CCTV, 사물인터넷 등)

※ 공통사항 : 도로굴착 통제기간에 저촉되지 않는 노선

Ⅳ		추진계획

○ 2024년 대상지(개량노선)

구 분	등주 (본)	차도등 (개)	보행등 (개)	분전함 (면)	선로 (m)	설치 년도	비 고
모래내로 (백련교~ 고은초교)	24	25 (재활용)	24 (재활용)	1	675	2005	한쪽 방향
신촌역로 (신촌로~ 성산로)	23	23 (재활용)	2 (재활용)	2	1,200	2008	양방향 (지그재그)

※ 신촌역로는 알루미늄 목재등주로 노후화가 진행중에 있어 교체가 필요함

○ 사업기간 : 2024. 1. ~ 2024. 10. 31.

○ 예 산 액 : 금400,000천원(시비)[모래내로 160,000천원, 신촌역로 240,000천원]

○ 사업내용 : 가로등주 47본, 분전함 3면 및 선로 1.9km 개량 등

○ 추진방향

- 모래내로 및 신촌역로는 15년이상 경과한 노후 선로로 LED등기구는 재활용하고,  가로등주와 선로는 개량

- 분전함은 보행안내시안 또는 가로등주 일체형 설치로 쾌적한 도로환경 조성

○ 상시전원 활용계획

- 빛으로 바닥이나 벽면에 원하는 디자인을 구현하는 로고라이트 20개소 설치

Ⅴ		추진일정

○ 2023. 6. 22. ~  : 2024년 대상지 서울시 도로시설과 제출

○ 2024. 1. ~ 2.   : 자체설계

○ 2024. 2. ~ 3.    : 계약심사 및 공사발주

○ 2024. 4. ~ 10.   : 공사시행 및 준공

Ⅵ		기대효과

○ 노후·불량시설물 적기 정비로 전기안전사고 예방 및 에너지 절약에 기여

○ 24시간 상시전원 공급으로 다양한 스마트 도시서비스 제공

○ 고효율 저소비의 LED 가로등 교체로 소비에너지 절감

○ 야간 이용주민들에게 밝고 안전한 도로환경제공

Ⅶ		행정사항

○ 2024년 노후 도로조명시설 개량사업 추진계획 서울시 도로시설과 제출

붙임 : 1. 서울시 공문 1부.

2. 위치도 및 현황사진 1부.  끝.