아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시한강사업본부
수신	환경수질과장
(경유)
제목	이동형화장실 부상형 전환 공사 계약변경 및 공사기간 연장 알림

1. 환경수질과-25767호(2022.11.10) 및 3549호(2023.05.02)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 이동형 화장실 부상형 전환 공사 지점이 축소됨에 따라 아래와 같이 변경 계약하였음을 알려드립니다.

가. 공 사 명 : 한강공원 이동형 화장실 부상형 전환 공사

나. 위    치 : 한강공원 일대 화장실

다. 변경금액 : *******************

라. 변경기간 : ****************************.

마. 도 급 사 : *********

바. 변경내용

- 금액변경 : **************************************

구 분	도 급 비(원)		증·감	사 유
	당초 계약금액	변경금액
합 계	**************	**************	***************	물량감소
공급가액	**************	**************
부 가 세	************	************

- 준공기한 연기

구 분	당 초	변 경	증 · 감
공사기간	**********************	**********************	******

사. 변경사유

- 공사물량 감소(부상형 전환 화장실 11동 → 9동)

- 동절기(12월~ 2월) 공사중지(-3℃ 이하 콘크리트 타설 금지)로 기한 연장 불가피

※ 변경된 공사기간에 따라 기반시설공사 및 전기공사 등도 기한 연장

붙임  1. 방침서(이동형 화장실부상형 전환 공사 설계변경) 1부.

2. 공사변경계약서 1부.

3. 변경내역서(화장실 부상형 전환 공사) 1부.   끝.

	기 반 시 설 과 장
주무관	정영환		기반시설과장	06/21
이병철
협조자
시행	기반시설과-4296	(	2023. 6. 21.	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257, 서울특별시 한강사업본부 시설부 기전설비과	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	02-3780-0670	/전송	02-3780-0744	/	toncar9@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)