문서번호	시설관리과-14333
결재일자	2023. 6. 21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장		동부수도사업소장
강인원	김대용	이태형		06/21
				정한호
협 조

(2022년 동대문구, 중랑구 관내 상수도공사 건설폐기물 처리용역)

설계변경 심의결과 보고(2회, 최종)

2023.06.

동부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

(2022년 동대문구, 중랑구 관내 상수도공사 건설폐기물 처리용역)

설계변경 심의결과 보고(2회, 최종)

「2022년 동대문구, 중랑구 관내 상수도공사 건설폐기물 처리용역」과 관련하여 설계변경(2회, 최종) 심의위원회를 개최하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		용역 개요

□ 용 역 명: 2022년 동대문구, 중랑구 관내 상수도공사 건설폐기물 처리용역

□ 용역금액: ***********************************

□ 용역기간: **********************************************************

□ 용역물량: ****************************

□ 계약업체: ****************

Ⅱ		변경 개요

□ 총 물량(총차)

구분		당초	변경	증·감
폐기물운반 (㎥)	폐아스콘	553	594	증) 41
	폐콘크리트	728	784	증) 56
	폐토석	266	398	증) 132
	소계	1,547	1,776	증) 229
폐기물처리 (t)	폐아스콘	1,302.38	1,400.38	증) 98
	폐콘크리트	1,680	1,809	증) 129
	폐토석	454	679	증) 225
	소계	3,436.38	3,888.38	증) 452

□ 용역비 변경

(단위: 원)

구분	당초	변경	증·감	비고
용역비 (총차)	113,625,000	129,212,000	증) 15,587,000

Ⅲ		심의개최

□ 심의일시: 2023.06.14.(수) 10:00

□ 심의장소: 시설관리과 사무실(3층)

□ 참석위원: 시설관리과장 등 총 5명

Ⅲ		심의결과

□ 심의내용

ㅇ 물량변동 및 단가적용 등의 적정성 여부: 적정

ㅇ 관련법규 및 규정 적법성 여부: 적정

ㅇ 설계변경 세부내용 및 사유 등 타당성 여부: 적정

Ⅳ		처리의견

□ 설계변경 심의결과 물량변동 및 단가산정 등이 적정함에 따라 계약 시행하고자 함

붙임 1. 방침서 1부.
2. 설계변경 심의의견서 1부
3. 설계변경 내역서(최종) 1부.  끝.