문서번호	토목부-11294
결재일자	2023. 6. 21.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
이상현		이성주	06/21
			이임섭
협 조
	주무관			이회진

- 창동 상계 동서간 연결교량 건설공사 건설사업관리용역 -

건설사업관리기술인 수방기간 운영계획 보고

2023. 6.

도시기반시설본부

(토       목       부)

- 창동 상계 동서간 연결교량 건설공사 건설사업관리용역 -

건설사업관리기술인 수방기간 운영계획 보고

「창동 상계 동서간 연결교량 건설공사」공사 추진과 관련하여 수방기간 건설사업관리단 운영 계획을 보고 드림

※ 수방기간 5개월 중 3개월 상주감리원 축소(당초 4인→ 2~3인) 운영

□ 관련 근거

ㅇ 수방기간 건설사업관리단 운영계획 보고[창동상계 제23-190호, 2023.06.20.]

□ 용역 개요

ㅇ 용 역 명: 창동상계 동서간 연결교량 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역

ㅇ 용역기간: '21.04.19. ~ '24.05.17.(3차 '23.01.01. ~ '23.12.31.)

ㅇ 용 역 비: *********************

ㅇ 용 역 사: ********* 외 2개사

□ 수방기간 운영계획

ㅇ 조정 사유

- 하천 내 공사가 중지되는 수방기간 동안 건설사업관리기술인 투입을 조정하여 건설사업관리단을 효율적으로 운용

ㅇ 운영 기간 : 수방기간 중 3개월(07.01. ~ 09.31.)

ㅇ 운영 방법 : 기투입된 건설사업관리기술인 수방기간 동안 교대로 1개월씩 철수

(단위 : 인·월)

구 분	특 급	고 급	중 급		계	비 고
	책임기술인	토 목	안 전	토 목
당 초	5	5	5	5	20
변경(안)	4	4	4	4	16	수방기간(5개월) 동안 1개월씩 교대로 철수
증·감	△1	△1	△1	△1	△4

※ 철수 시기는 현장 상황을 고려하여 탄력적으로 운영

□ 조치 계획

ㅇ 건설사업관리단 운영계획을 검토한 결과 적정한 것으로 판단되며, 수방기간 상주 감리인원을 축소 운영하여 예산을 절감하고 건설사업관리단을 효율적으로 운용하고자 함

붙임 : 건설사업관리단 수방기간 운영계획 보고 1부.  끝.