문서번호	시설보수과-5281
결재일자	2023. 6. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
김규춘		06/22
		임형규
협 조

『오목교 보수공사』

“현장 실정보고(1회)에 따른 검토결과 보고”

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 6.

강서도로사업소

(시설보수과)

『오목교 보수공사』

“현장 실정보고(제1회)에 따른 검토결과 보고”

2022년 본예산 사업으로 추진 중인『오목교 보수공사』와 관련 감독위탁 기관으로부터 제출된 "현장 실정보고(제1회)" 검토결과 보고 임

Ⅰ		공 사 현 황

□ 공 사 명 : 오목교 보수공사

□ 공사기간 : 2023. 4. 18 ~ 10. 14

□ 사 업 비 : 1,450백만원 (도급비 : 1,001,160,700원)

□ 공사개요 : 교면방수 7,207㎡, 교면포장 72a, 신축이음보수 5m, 기타1식

□ 도 급 자 : (주)정훈라이테크  대표 천 세 관

□ 공 정 율 : 35%

Ⅱ		보 고 내 용

□ 관련근거

○ 현장 실정 검토보고서(제1회) 제출

- 유공관 추가 설치물량 변경(증)

※ 서울시설공단 공사감독1처-2906호(2023.6.16)

□ 실정보고 내용 (세부내용 #붙임)

○ 유공관 추가 설치물량 변경(증)

- 당초 설계내역에 유공관 설치는 본선 배수로 좌,우측 종 방향으로만 설치 반영 되어

있으며, 횡방향조인트(8개)후타재 부분에는 반영되어있지 않아 우기시 유입된 노면수의

원활한 배수처리를 위한 유공관 추가 설치가 필요한 실정임.

<현황사진>

○ 유공관 물량 증·감 사항

공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증·감	비 고
유공관 설치	야간, D=10mm	m	597	821	증) 224
당 초 : 교량 배수로 측면(좌,우) L=597m - 변 경 : 교량 배수로 측면(좌,우) L=597m + 영등포방향 횡방향 신축이음구간 L=224m = 821m

□ 검토의견

○ 상기 보고내용과 같이 횡방향 신축이음 구간에 추가 유공관을 설치하여 우기시 유입된

노면수를 원활히 배수 처리 하여 아스팔트 포장의 품질 확보 및 내구성 증진을 위한

유공관 추가설치는 타당한다고 사료 됨.

Ⅲ		검 토 결 과

□ 감독기관(서울시설공단)으로부터 보고된 현장실정보고(제1회) 내용에 대하여

본 공사에 반영 조치코자 하며, 물량변경(증·감)부분에 대해서는 추후 설계변경시

정산 조치코자 함.

▶ 개략 공사비 : (증) 3,300천원(제경비 포함)

Ⅳ		향 후 계 획

□ 2023. 06. 23 : 감독기관 통보(승인)

□ 2023. 06월 ~ 10월 : 잔여공종 추진

□ 2023. 10. 14 : 준공

따로붙임  관련문서(공사실정보고서 등) 1부.  끝.