문서번호	배수과-5660
결재일자	2023. 6. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
천유연		유양현	06/22
			송헌영
협 조
	주무관			김영수
	주무관			조성균
	주무관			이성교

『영동대로 상수도 이설(2단계)공사』 관련

상수도관 부설 완료에 따른 급수운영 추진계획

2023.  6. 22. (목)

상수도사업본부

(급수부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

『영동대로 상수도 이설(2단계)공사』 관련

상수도관 부설 완료에 따른 급수운영 추진계획

급수부장:송헌영 ☎3146-1401 배수과장:유양현 ☎1430 담당:천유연 ☎1440

우리 본부(배수과)에서 시행중인 『영동대로 상수도관 이설(2단계)공사』 중 봉은사로 D1200㎜ 구간 부설 공사가 완료되어 우선 통수를 추진하고, 영동대로 측에서 추가 요청한 D400㎜ 이설공사를 위한 수계전환 및 급수운영 추진계획을 보고드림.

Ⅰ		현 황

□ 추진근거

ㅇ 「영동대로 지하공간 복합개발사업」관련 저촉상수도관 이설협의 검토결과 보고(배수과-10591호,’21.12.21.)

ㅇ 「영동대로 지하공간 복합개발사업」관련 영동대로 상수도관 이설(2단계) 공사 시행계획(배수과-25776호,’22.10.24.)

ㅇ 「영동대로 지하공간 복합개발사업」상수도관 이설요청에 따른 영동대로(코엑스) 배수관(D400) 임시이설 계획(배수과-5522호,’23.6.19.)

<사업개요>

ㅇ 사 업 명 : 영동대로 지하공간 복합개발사업

ㅇ 위    치 : 코엑스 사거리(9호선 봉은사역) ~ 삼성역(2호선) 사거리 일대

ㅇ 기    간 : 2021. 2. ~ 2028. 4.

ㅇ 규    모 : 복합환승센터 597m, 철도터널 403m

- 철도통합역사, 버스환승정류장, 주차장, 공공·상업공간, 지상부 광장 등

	<이설개요>
ㅇ 공 사 명 : 영동대로 상수도 이설(2단계) ㅇ 개 요 : D900~1,200㎜, L=1.2㎞ ㅇ 기 간 : 2022. 11. ~ 2023. 8. ㅇ 공사위치 : 코엑스사거리(봉은사역)~봉은사교차로~삼성역사거리

□ 급수현황

ㅇ 강남구 지역은 삼성배수지와 서초배수지로 혼재되어 급수공급 중

ㅇ 해당 지역은 코엑스, GBC, 호텔 등 계량기 D80㎜ 이상 다량급수처 밀집

***********************

Ⅱ		급수운영 계획

□ 추진개요

ㅇ 기  간: ’23. 6. ~ ’23. 9.

ㅇ 내  용: 삼성배수지 배수본관 이설 및 통수

*****************************************************************************************

- 단계별 통수 시행

․ 1단계 : 봉은사로 D1200㎜ 담수 및 통수 (금회 시행)

․ 2단계 : 영동대로 동측(코엑스) 상수도관(D400㎜) 임시 이설

․ 3단계 : 테헤란로87길 D900㎜ 담수 및 통수

․ 4단계 : 원인자 이설구간 상수도관 이설 및 통수

□ 주요 시설 현황도

*

□ 1단계 주요 조절 대상 밸브 현황

**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

□ 급수운영 추진

담수 및 세척(D1,200㎜, L=365m)

ㅇ 담   수: 제수밸브(①) 서서히 개방(0→100%)

ㅇ 관 세척: 퇴수밸브(③) 조절(세척유량: 825㎥)

신설관로 통수 및 기존관로 차단

ㅇ 통    수: 제수밸브(②) 서서히 개방(0→100%)

- 기존관(D900㎜)과 신설관(D1,200㎜) 혼용하여 공급

ㅇ 차    단: 제수밸브(④) 조절(100→0%) → 봉은사 삼거리 기존관(D900㎜) 차단

기존관로 폐쇄 및 분기

ㅇ 폐    쇄: 기존관(D900㎜) 절단 → 맹플랜지 설치

- 기존관(D900㎜) 충진 진행

ㅇ 분    기: 맹플랜지 뒤 D1200/900㎜ 분기하여 테헤란로 구간 부설

혼탁수 발생 대비

ㅇ 비상 상황 체계 유지(본부 및 사업소 합동)

- SNS 개설, 민원실, 야간 당직실에 상황 공유하여 민원 발생 여부 모니터링

- 수질자동감시시스템 모니터링(삼성2동[올림터])

Ⅲ		행정사항 및 향후계획

□ 행정사항

ㅇ 야간 세척 및 통수 시 안전관리 철저

ㅇ 강남수도사업소

- 밸브 등 시설물 사전 점검 및 담수를 위한 밸브 조절, 유량 모니터링 등 협조

□ 향후계획

ㅇ 봉은사로 구간 D1200㎜ 세척 및 통수	’23. 6. 26.~ 7. 5.

- 연결관로 고압세척 및 CCTV 촬영	’23. 6. 26.~ 6. 27.

- 봉은사로 D1200㎜ 세척 및 통수	’23. 6. 28.~ 7. 5.

ㅇ 영동대로 동측(코엑스) D400㎜ 임시 이설	’23. 6. 26.~ 7. 10.

ㅇ 테헤란로87길 구간 D900㎜ 세척 및 통수	’23. 7.  끝.