문서번호	급수운영과-10339
결재일자	2023. 6. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장	강동수도사업소장
신승무	양봉우	이규희	전결 06/22
			代송정자
협 조

- 2022년 강동수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사[2차] -감독 보고[설계변경(제1회 - 최종분)]

2023. 06.

강동수도사업소

(급수운영과)

- 2022년 강동수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사 -

감독 보고[설계변경(제1회-최종분) 관련]

우리 사업소에서 공사 시행하고 있는『2022년 강동수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사[2차]』시행 관련, 공사물량 변경에 따른 도급비 감액사항이 발생하여 설계변경(제1회-최종분)을 시행코자 보고 드림

Ⅰ		공 사 개 요

□ 공 사 명: 2022년 강동수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사[2차]

□ 공사내용: 아스팔트포장(중층) 49.89a, 아스팔트포장(표층,평삭) 88.24a,

보도블록포장 3.86a 등

□ 공사기간: 2023.01.27. ~ 2023.06.30.

□ 계약상대자: 모원건설(주)

- 건설사업관리자: (주)건양엔지니어링

□ 도 급 비: 971,532,000원

Ⅱ		설계변경 사유

□ 시공물량 증·감

○ 아스팔트포장 절단 외 245개 공종 물량 증·감

주요공종	단위	당초	변경	증·감	비고
아스팔트(중층)	a	49.89	33.07	감) 16.82
아스팔트(표층,평삭)	a	88.24	40.93	증) 47.31
보도블록	a	3.86	23.27	증) 19.41
콘크리트	a	4.00	2.51	감) 2.49
계	a

□ 제경비(4대보험료 등) 실정산 반영

□ 계약금액 변경

구분	당초	변경	증·감	비고
도급비	971,532,000	729,912,000	감)241,620,000

※ 도급비 감액(최종 설계변경) 사항에 대하여는 설계변경 심의회 개최 예정

Ⅲ		조 치 의 견

□ 상기 보고 내용과 같이 심의회 결과를 반영하여 설계변경(제1회-최종분)을 시행코자 함

붙임  1. 관련공문 각1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 계약금액 조정 검증확인서 1부.  끝.