아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	변경계약(계약기간 연장)의뢰[동북권 아동청소년예술교육센터 건립 전기공사, 통신공사]

우리부서에서 진행하는「동북권 아동청소년예술교육센터 건립 전기공사, 통신공사」와 관련하여 아래와 같이 계약기간 연장 변경계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 계약기간 연장내용

분야	차수	계약기간		비고
		변경전	변경후
전기	총차	***********************	***********************	*****
	2차	***********************	***********************
통신	총차	***********************	***********************
	2차	***********************	***********************

※ 계약금액 변동없음

2. 연장사유 : 선행 건축공사 공기연장에 따른 후속 설비공정 공사기간 연장
3. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임  1. 방침서  1부.
2. 합의각서 각 1부.  끝.

	설 비 부 장
주무관	이정훈		건축설비과장	代김범철		설비부장	06/22
신용휴
협조자
시행	설비부-9310	(	2023. 6. 22.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, (무교동 96번지) 프리미어플레이스 빌딩 15층	/	http://seoul.go.kr
전화	02-6438-2333	/전송	02-6438-2399	/	ljh0447@seoul.go.kr	/	부분공개(5)