문서번호	시설관리과-11165
결재일자	2023. 6. 23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
시설관리팀장		시설관리과장
김재영		06/23
		문병희
협조

'22년 서초구 관내 상수도시설물 설치 및 소화전보수공사 설계변경 심의결과 보고

2023년 6월

강남수도사업소

시설관리과

'22년 서초구 관내 상수도시설물 설치 및 소화전보수공사

설계변경 심의결과 보고

「2022년 서초구 관내 상수도시설물 설치 및 소화전보수공사」를  물량증감에

따라 설계변경 심의회를 개최 그 결과를 보고합니다

Ⅰ		개 요

공 사 명 : 2022년 서초구 관내 상수도시설물 설치 및 소화전보수공사

공사개요 : 노후밸브교체 및 변실설치 등 221개소

계약업체 : 광희건설(주) 대표 우광희

계약기간 : 2022.5.27.(계약일) ~ 2023. 6.30.

계약금액 : 947,045,000원(감853,400원)

Ⅱ		설계변경 사항

설계변경 사유

○ 그간 작업지시 물량과 현장여건 변화에 따른 시공물량 증․감으로 설계변경

설계변경 심사 결과

구 분	금 액		증·감(원)
	당초(원)	변경(원)
도 급 비	947,898,400	947,045,000	감)853,400원

○ 세부 심사의견

- 설계변경의 타당성 : 타당함

- 제경비 적정 산정 및 적용 적정성 여부 : 타당함

- 각종 제반규정 준수 여부 : 준수

- 관련 규정 불명확한 내용에 대한 검토 등 : 적정함

차수별 변경내역

구 분	당 초	변 경	증, 감	기 간
총부기금액	947,898,400원	947,045,000원		2022.05.31.~2023.06.30
1차수 금액	473,949,200원	543,642,000원	증)69,692,800원	2022.05.31.~2022.12.31
2차수 금액	473,949,200원	403,403,000원	감)853,400원	2023.01.01.~2023.06.30

Ⅲ		조치의견

위와 같이 본 심의결과에 의거 설계변경 시행 및 변경계약을 의뢰코자 합니다.

첨 부 : 1) 설계변경 심의 의견서 1부.

2) 설계변경사유서 1부.

3) 설계변경내역서 1부.

4) 제비율 검증확인서 1부. 끝.