아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	설계변경에 따른 계약변경 의뢰(서울 수상레포츠 통합센터 육상1 계류장)

1. 수상시설과-3231(2023..6.21)호와 관련입니다.

2. 우리과에서 시행하고 있는 『서울 수상레포츠 통합센터 육상1 계류장 정비공사』에 대해

아래와 같이 설계변경(정산)하고 계약변경을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
총 공사비	170,000,000	146,054,340	감 23,945,660
도 급 비	87,456,600	76,170,000	감 11,286,600
관 급 비	69,890,000	69,884,340	감 5,660
이 전 비	12,653,400	0	감 12,653,400

가. 공 사 명 : 서울 수상레포츠 통합센터 육상1 계류장 정비공사

나. 도 급 자 : 희진산업(주)  대표  최귀송, 최승필

다. 설계변경 내역                                                     (단위:원)

라. 변경사유 : 신규공종 발생 및 시공물량 증·감, 제경비 정산 등에 따른 변경

마. 예산과목 : 한강 하천시설 관리, 난지 수상레포츠 통합센터 유지관리, 시설비

붙임   1. 설계변경 검토보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	수 상 시 설 과 장
주무관	이이용		수상시설과장	권혁제		수상사업부장	06/22
이호진
협조자	주무관	안미희		총무과장	박서영
시행	수상시설과-3241	(	2023. 6. 22.	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257, 한강사업본부 수상사업부 수상시설과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-3780-0737	/전송	02-3780-0803	/	lyy2203@seoul.go.kr	/	부분공개(5)