아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	준공기한 변경계약 의뢰(2022년-2차 마포, 서대문구 관내 건설폐기물 처리용역)

우리 과에서 시행중인 다음 용역의 준공기한을 연기하고자 아래와 같이 변경계약 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 용 역 명 : 2022년-2차 마포, 서대문구 관내 상수도(단위공사) 및 관내 포장복구 공사 건설폐기물 처리용역

2. 계 약 자 : *******************

3. 용역금액 : ******************

4. 계약기간

- 당초 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 6. 30.

- 변경 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 7. 31.

5. 연기사유 : 신규 계약 체결 지연(방침서 참조)

6. 귀책소재 : 서부수도사업소

7. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임  1. 준공기한 연기 방침서 1부.

2. 합의서 1부.  끝.

	급 수 운 영 과 장
주무관	박재성		급수관리팀장	신정우		급수운영과장	06/22
채재일
협조자
시행	급수운영과-10936	(	2023. 6. 22.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41, (장충동2가)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3661	/전송	02-3146-3689	/	wotjd8448@seoul.go.kr	/	부분공개(5)