문서번호	도로보수과-6257
결재일자	2023. 6. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장
안귀형		06/23
		김순수
협 조

『2023년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)』

설계변경(1회) 검토 보고

2023. 6.

북부도로사업소

(도로보수과)

『2023년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)』

설 계 변 경 (1회)  검 토  보 고

우리사업소에서 시행하는『2023년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)』와 관련하여 시공물량 증·감에 따른 설계변경(1회) 검토결과를 보고 드림.

		관련근거

❍ (주)건양엔지니어링 제23-205호(2023.06.23.) 제1차 설계변경(연간단가)

		공사개요

❍ 공 사 명 : 2023년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)

❍ 공사기간 : 2023.01.27.~2023.12.31

❍ 공사규모 : *************************************

❍ 공 사 비 : **************************************

❍ 시 공 사 : **************

❍ 건설사업관리단 : ********

		보고내용

❍ 노면표시 작업지시별 시공물량 증·감에 따른 변경

❍ 기타 경미한 변경

		주요 변경내용

❍ 공사비 변경내역: *******************

(단위 : 원)

구 분	공 사 금 액			비고
	당 초	변 경	증·감
총공사비	***********	***********	-
도 급 비	***********	***********	-
관 급 비	***********	***********	-

❍ 주요공종 변경내역

공 종	규격	단위	수 량		증·감	비고
			당초	변경
차선도색	4종(융착형)	m	*******	******	*********
차선도색	5종(상온)	m	******	******	*********
차로밑그림		m	******	******	*********
교통신호수		명	***	***	*********
싸인보드카		대	**	**	*********
기타 부대공	변경사항 반영	식

		감리원 검토의견

❍ 본 공사에 대한 실지작업물량의 증감에 따라 설계변경서류 검토결과 적합하다고 사료되어 설계변경 요청함.

		조치계획

❍ 상기 보고내용과 같이 물량 증·감 사항에 대하여는 설계변경(정산) 시행하고 변경계약 체결후 준공처리코자 함.

붙임 1. 설계변경(1회) 검토보고서(감리) 1부.

2. 설계변경(1회) 내역서 1부.

3. 검증확인서 1부.  끝.