문서번호	급수운영과-10230
결재일자	2023. 6. 26.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
서동민		서규석	06/26
			이용구
협조

설계변경(2회-최종) 심사결과 보고

[2022년 대학동 외 10개동 상수도공사(장기계속단가)]

2023.  06. 26.(월)

남부수도사업소

(급수운영과)

설계변경 심사결과 보고(2회-최종)

「2022년 대학동 외 10개동 상수도공사(장기계속 단가계약)」신규공종 및 계약⦁물량 증감에 따른 설계변경 심사를 마치고 그 결과를 보고 드림

1		설계변경 검토보고

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 2022년 대학동 외 10개동 상수도공사(장기계속단가)

ㅇ 공사개요 : D=13~300mm, L=1,399m

ㅇ 공사기간 : 2022. 07. 04. ~ 2023. 6. 30.

ㅇ 도 급 자 : ************

ㅇ 도 급 액 : *************

□ 설계변경 시행 금액

********************************************************************************************

□ 설계변경 근거 및 사유

ㅇ 지방계약법 시행령 제74조(설계 변경으로 인한 계약금액의 조정)

- 제1항 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 공사계약에서 설계 변경으로 인하여 공사량이 증감이 발생하였을 때에는 『지방계약법 제22조 제1항』에 따라 해당 계약금액을 조정한다.

ㅇ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준

- 제13장 공사계약 일반조건 “6(공사설계의변경)-1(설계변경)-다”의 규정

ㅇ 공사 시행중 현장여건 변동에 따른 신규공종 발생 및 물량변동(증 ․ 감)

2		설계변경 심사

□ 관련문서

ㅇ 설계변경 심사 요청 : 급수운영과-9925(‘23.06.20.)

ㅇ 설계변경 심사 결과 : 안전조사과-6859(‘23.06.26.)

□ 설계변경 심사 결과

ㅇ 설계변경 타당성 : 타당

ㅇ 신규공종 및 계약물량 변동 적정 여부 : 적정

ㅇ 제경비 적정 산정 및 적용 적정성 여부 : 적정

ㅇ 계약금액조정 검토결과서

- 토사(잔토 및 환토 등) 공종 및 자재 간 수량 일치 조정

- 주간 환토소운반 및 환토상차 수량 조정

- 일부 부설공, 구조물공의 공종 및 자재 간 수량 일치 조정

- 전자인력관리시스템 단말기 부가세 중복계상 조정

□ 설계변경 심사 결과금액

ㅇ 심사결과에 따른 증감내용

***************************************************************************************************************************

ㅇ 설계변경 시행 금액(심사 완료)

*********************************************************************************************

3		설계변경 세부내용

□ 설계변경 공사개요

구 분	당 초	변 경(2회 설계변경)
공사개요	D=13~300mm, L=1,399m	D=13~300mm, L=1,658m

ㅇ 주요공종 물량 증가내역

- 아스팔트 포장절단 200mm 이하, 지세 외 216개 공종

ㅇ 주요공종 물량 감소내역

- 콘크리트 포장절단 200mm 이하, 지세 외 319개 공종

ㅇ 신규자재 발생내역

- 누수방지대 D=150/80mm 외 5개 자재

ㅇ 신규공종 발생내역

- 계량기 교체공 15mm 외 30개 공종

□ 계약금액조정 검증결과 : 적정

ㅇ 계약금액검증조정 시스템에 입력하여 확인결과 최초계약에 따른 요율을 상한초과한 항목이 없으며 특이사항없음.

4		조치계획

□ 설계변경 시행 및 계약의뢰

ㅇ 보험료, 퇴직공제부금비, 산업안전보건관리비, 건설기계대여대금 등 정산이 필요한 항목은 자료를 제출받아 관련 규정에 맞게 처리하고자 함.

ㅇ 본부 설계변경 심사결과가 적정한 것으로 판단되는 바, 행정지원과에 변경계약을 의뢰하여 설계변경을 시행하고자 함.

붙임  1. 설계변경 내역서(심사완료) 1부.

2. 계약금액조정 검증확인서 1부.

3. 설계변경 심사결과 통보 1부  끝.