문서번호	시설관리과-10752
결재일자	2023. 6. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
탁기홍		김성호	06/26
			이규현
협조

설계변경 심의회 개최 결과 보고

(2022년 수유동외 5개동 상수도공사-2차,최종)

2023. 6.

북부수도사업소

시설관리과

설계변경 심의회 개최 결과 보고

「2022년 수유동외 5개동 상수도공사」의 신규공종 및 시공물량 증·감 등에 따른 설계변경 심의회를 개최하고 그 결과를 보고드림.

1. 공사 개요

가. 공 사 명: 2022년 수유동외 5개동 상수도공사(장기계속단가계약)

나. 공사개요

- 당 초: 상수도관 부설 D=13∼300㎜, L=1,049m

- 변 경: 상수도관 부설 D=13∼300㎜, L=1,503m

다. 계약기간: 2023.01.01.~2023.6.30.(총부기기간 : 2022.05.27.~2023.06.30.)

라. 공사비 변경

구 분	당초(원)	변경(원)	증 · 감(원)	비 고
총부기금액	***********	***********	*************
1차수 금액	***********	***********	*
2차수 금액	***********	***********	*************

마. 도 급 자: *******************

2. 심의회 개최현황

가. 심의일정: 2023. 6. 26. 10:00

나. 심의장소: 북부수도사업소 시설관리과 사무실

다. 심의위원장: ********

라. 심의위원: ****************************

3. 심의 내용

가. 계약물량 증·감 및 신규종종에 따른 설계변경 적정 여부

나. 계약변동(증·감) 수량, 신규공종 단가 낙찰률 범위내 적용 적정여부 등

다. 제경비 적정산정 및 적용의 적정성 여부 등

4. 심의 결과

가. 설계변경의 타당성: 타당함

나. 신규공종 단가 산출 적정 여부: 적정함

다. 계약변동(증·감)물량 계약단가 낙찰률 적정 적용 여부: 적정함

라. 제경비 적정 산정 및 적용 적정성: 적정함

마. 각종 제반규정 준수 여부: 준수

5. 조치 의견

위와 같이 설계변경 내역 심의결과 설계변경이 타당하고 검토항목이 적정하여 본 심의결과에 의거 설계변경 시행 및 변경계약을 의뢰하고자 합니다.

붙임  1.설계변경 검토의견서 1부.

2.설계변경 사유서 1부.

3.설계변경 내역서 1부.  끝.