문서번호	기반시설과-4421
결재일자	2023. 6. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
이준범		代이호연	06/26
			代김수영
협조

「한강공원 매점(반포 1,2호) 리모델링 공사」

설계변경(2회) 검토 보고

2023. 06.

한강사업본부

(기반시설과)

「한강공원 매점(반포 1,2호) 리모델링 공사」

설계변경(2회) 검토 보고

실정보고 승인건 반영 및 준공전 보험료 등 정산에 대한 설계 변경 검토 보고임.

Ⅰ		관 련 근 거

□ 설계변경 요청서[대의(한강공원)제23-12('23.06.26.)호]

□ 설계변경 감리자의견서[와이건축사사무소YA********('23.06.26.)호]

Ⅱ		공 사 개 요

□ 공 사 명: 한강공원 매점(난지1,2호)리모델링 공사

□ 공사기간: 2023.02.22.~2023.06.30.

□ 도 급 비: 519,718,000원

□ 도 급 사: 대의건설주식회사

□ 감 리 사: (주)와이건축사사무소

Ⅲ		추 진 현 황

□ '23.02.22.: 공사 착공

□ '23.05.18.: 설계(1회)변경

□ '23.06.21.: 설계변경(2회)위원회(내부) 개최

Ⅳ		보 고 내 용

□ 실정보고 승인건 반영 및 준공전 보험료 등을 정산준공하고자함.

○ 실정보고 승인건에 대한 설계변경***********

· 실정보고 검토 보고(기반시설과-4187('23.06.15.)호)

○ 준공전 보험료 등 정산

(단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
산재보험료	*********	*********	***********
고용보험료	*********	*********	************
건강보험료	*********	*******	***********
노인장기 요양보험료	*******	******	***********
연금보험료	*********	*	***********
퇴직공제부금비	*********	*******	***********
안전관리비	*********	*********	***********
기타경비	**********	**********	***********
환경보전비	*******	*	***********
건설기계대여지급보증서 발급수수료	*******	*******	***********
고용개선지원비	**********	*********	***********
소 계	**********	**********	***********

□ 공사비 증감 현황

(단위: 원)

*******		*******	*******	***
***	****	***********	***********	***********
	*****	**********	**********	***********
	*	***********	***********	***********

□ 공사소요기간: 증감없음

******	*******	*******	***
****	*********************	*********************	****

□ 조치 의견

○ 실정보고 승인 사항 반영 및 준공전 보험료 정산하여 총무과에 설계변경 요청후 준공.

Ⅴ		향 후 계 획

□ '23. 06. 30. : 공사 준공

붙임  1. 설계변경(2회) 요청서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 자문결과 검토 의견서 1부.

4. 계약검증확인서 1부.  끝.