문서번호	정보공개담당관-13686
결재일자	2023. 6. 26.
공개여부	부분공개(2,5)
방침번호

			시 민
주무관		정보공개팀장	정보공개담당관
박영옥		장혜경	06/26
			오경희
협조
	주무관		이유빈

2023년 정보소통광장·문서공개시스템 기능개선 및 유지관리 사업  부분준공검수 결과보고

2023. 6. 26.(월)

디지털정책관

(정보공개담당관)

2023년 정보소통광장·문서공개시스템 기능개선 및 유지관리 사업

부분준공검수 결과보고

2023년 정보소통광장 · 문서공개시스템 기능개선 및 유지관리 사업이 원활하게 진행됨에 따라 부분준공검수(사)를 실시하고자 함

1		사업개요

□ 사 업 명 : 2023년 정보소통광장·문서공개시스템 기능개선 및 유지관리

□ 사업기간 : 2023. 1. 1. ~ 12. 31.(12개월)

□ 계약업체 : ****

□ 계약금액 : ************

□ 주요 과업내용

ㅇ 정보소통광장 로그 분석 툴 업그레이드 적용 및 프로그램 개발

ㅇ 개방형 데이터 포맷 변환 기능 개발 및 변환

ㅇ ******* 솔루션 도입 및 커스터마이징

ㅇ 본청 및 자치구 문서변경 요청 기능 개발

ㅇ 차세대 업무관리 전환 자치구 결재문서 연계 및 전송 기능 확대

ㅇ 투자출연기관 연계 방식 변경 및 연계지원

ㅇ *****************************

ㅇ 정보소통광장 페이스북 요일별 콘텐츠 제작 · 배포

ㅇ 정보소통광장 · 문서공개시스템 안정적 운영 및 유지관리

2		검수내용

□ 부분준공일자 : 2023. 6. 20.

□ 부분준공금액 : ************

(단위 : 원)

구 분		집행일자	금 액	집행율	비고
계약금액		*	***********		******************* ******************* ********************
부분 준공 금액	선금	********	***********	***	******************* ******************* ********************
	집행액	*********	***********	*****	******************** ********************
	소계		***********	*****	******************* ******************* **********************
집행잔액		*******	***********		******************** ********************

□ 검 수 자

ㅇ 총  괄 : **********

ㅇ 담당자 : ******************

□ 부분준공내역

ㅇ 추진기간 : 2023. 1. 1. ~ 6. 20.

ㅇ 진 척 률 :***************************

ㅇ 기능개선 분야 주요내용

- 정보소통광장 로그 분석 툴 업그레이드 적용 및 프로그램 개발

·**************************************

- 행정정보의 개방형 포맷 변환 기능개발 및 변환

·결재문서를 개방형 포맷변환 기능 개발 및 변환추진

·**************************

·사전공개정보를 개방형 포맷으로 공개

- 월간 이용현황 시스템 자동산출 기능 개발

·******************************************

- 결재문서 검색결과 골라보기 서비스 개선

·골라보기 조건 선택 시 검색 결과가 즉시 화면에 표출되도록 개선

- *********** 도입 및 커스터마이징

·****기존 솔루션과 검출 테스트 성능 비교 및 기능테스트

- 차세대 업무관리 전환 자치구 결재문서 연계 및 전송 기능 확대

·대상 : 종로구(1월), 중구(2월), 서초구(3월), 서대문구(4월), 강북구(5월)

·방법 : 연계 API 활용 문서 속성정보, 결재문서 및 첨부파일 연계 및 테스트

- 본청 및 자치구 문서변경 요청 기능 개발

·(구)업무관리시스템에서 문서 정보 변경이 불가하여 문서공개시스템에 문서 정보를 변경할 수 있는 기능개발

ㅇ 유지관리 분야 주요내용

(’23.1.1. ~ 6.20., 단위 : 건)

구분	합계	1월	2월	3월	4월	5월	6월
발생	72	14	11	21	12	9	5
완료	68	14	11	21	12	8	2
진행	4	0	0	0	0	1	3

- 투자출연기관 결재문서 등록·연계 위한 시스템 유지운영 및 모니터링

·투자출연기관 문서 오류 분석 및 오류 관련 가이드 지원

- 행정포털 SSO 연계 변경에 따른 행정포털 연계 주소 변경

·*************************************

- 서울시의회 '정책개발 연구용역자료' 추가 연계 완료

- ********** 작업스케줄러 오류 처리

·********************************

- *****************************

- 행정정보 콘텐츠 제작(주간) 및 페이스북 게시(121회)

- 정보소통광장·문서공개시스템 상용SW 및 응용SW의 안정적 운영 및 유지관리

ㅇ 인력투입현황

(단위 : M/M)

구분	합계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계획	93.0	7.75	7.75	7.75	7.75	7.75	7.75	7.75	7.75	7.75	7.75	7.75	7.75
실투입	43.40	7.75	7.75	7.75	7.75	7.75	4.65
투입율	47%	100%	100%	100%	100%	100%	60%
연간계획	100%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%

붙임  1. 월간보고서 및 주간보고서 각 1부.

2. 선금정산내역서 및 증빙자료 각 1부.  끝.