아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강남수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(최종) 시행[(2022년 서초구 관내 상수도시설물 설치 및 소화전보수공사(장기계속단가계약)]

우리 사업소에서 시행중인「2022년 서초구 관내 상수도시설물 설치 및 소화전보수공사***********」에 대한  계약물량 증․감 및 신규공종이 발생함에 따라 아래와 같이 설계변경(최종)을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명: ******************************************

나. 계 약 자: **************

다. 공사기간: *******************************

라. 설계변경 금액

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증, 감	기 간
총부기금액	947,898,400원	947,045,000원	감)853,400원	2022.05.31.~2023.06.30
2차수 금액	404,256,400원	403,403,000원	감)853,400원	2023.01.01.~2023.06.30

마. 설계변경 사유: 계약 물량 증․감 및 신규 공종 발생

바. 최대이행금액(변경) : 600,000,000원

사. 예산과목

**********************************************

**************************************************

**************************************

*****************************************************

**********************************

붙임  1. 설계변경(1차) 심의결과 보고 1부.

2. 설계변경(1차) 심의의견서 1부.

3. 설계변경(1차) 내역서(사유서) 각 1부.

4. 설계변경(1차) 합의서 1부.

5. 검증확인서 각 1부. 끝.

.

시설관리팀장	김재영		시설관리과장	문병희		강남수도사업소장	06/26
박기용
협조자	행정지원과장	이영세
시행	시설관리과-11219	(	2023. 6. 26.	)	접수		(		)
우	06300	강남구 양재천로 199(도곡동) 강남수도사업소 시설관리과(4층)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4891	/전송	02-3146-4939	/	sdc5000@seoul.go.kr	/	부분공개(5)