문서번호	정수시설과-2024
결재일자	2023. 6. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
노성제		代노성제	06/27
			문인기
협 조

약품동 증설 전기 공사 설계변경 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 6.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

약품동 증설 전기 공사 설계변경 보고

우리 정수센터에서 시행 중인 약품동 증설 전기 공사에 대하여 물량 증‧감 사항 반영, 제경비 정산, 공기 연장 등을 위한 설계변경을 시행하고자 함

□ 공사개요

○ 공 사 명: 약품동 증설 전기 공사

○ 공사기간: 2022. 12. 1. ~ 2023. 6. 30.

○ 계약금액: ***********

○ 도 급 자: ****************

○ 공사내용: 제2정수장 약품저장동 증설에 따른 전기공사

□ 설계변경 사유 및 내용

○ 변경사유

- 물량 증감사항 반영 및 보험료 정산

- 선행 공정(건축) 지연에 따른 공기 연장

○ 계약금액 및 기간

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증‧감	비고
계약금액	**********	**********	**********
공사기간	’22.12.1.~’23.6.30.	’22.12.1.~’23.7.31.	1개월 연장

○ 주요 변경내용

- 당초 설계에 조명등기구 종류 및 설치 방법이 직부등 및 레이스웨이 방식으로 되어 있으나, 건물의 천장이 높아 설치 및 유지관리가 곤란하므로 벽부형 투광등으로 변경하여 예산을 절감하고 설치 안전 확보 및 유지관리 편의성 제고

- 선행 공종인 건축 외장재 설치 및 마감 공사가 지연되어 후속 공종인 조명등 설치 등 전기공사를 계약된 공사기간 내에 완료하기 어려우므로, 공기를 연장하여 전기 안전 및 품질 확보

- 도급자가 증빙자료 제출을 포기한 건강, 연금보험료 등 감액 및 물량 변경에 따른 제경비 정산

○ 단가적용

- 물량 증감 공종: 계약단가 적용

- 신규 발생 공종: 계약 시 낙찰률 적용

□ 조치의견

○ 위 변경 사항에 대하여 자체 설계변경 심의위원회를 개최하고 심의 결과에 따라 설계변경 시행하고자 함

○ 설계변경 심의위원회 내용

- 개최일시 : *********************

- 장    소 : *********

- 주요 심의사항

‣설계변경의 타당성

‣제경비 산정 및 적용 적정성 여부

‣물량변경의 적정성 여부

‣각종 제반 규정 준수여부 등

- 심의 위원

구 분	직 급	성 명	비 고
위원장	******	*****
위 원	****	*****
위 원	****	*****
위 원	****	*****
위 원	****	*****

붙임  1. 설계변경 내역서 1부.

2. 설계변경 내역 검증확인서 1부.

3. 설계변경 심의 설명서 1부.

4. 설계변경 심의 의견서(양식). 1부.  끝.