문서번호	공원녹지과-11019
결재일자	2023. 6. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관		하천녹지팀장		공원녹지과장		도시관리국장
박미래		정원석		석승우		전결 06/27
						임창섭
협조
	재무과장		김영규
	계약팀장		代이지현

「청계천 마장꿈놀이터 노후시설 정비사업」  실정사항 및 설계변경  검토보고

「청계천 마장꿈놀이터 노후시설 정비사업」  실정사항 및 설계변경 검토보고

2023. 6.

「청계천 마장꿈놀이터 노후시설 정비사업」

실정사항 및 설계변경 검토보고

「청계천 마장꿈놀이터 노후시설 정비사업」추진과 관련, 현장여건 및 실정사항을 반영하여 설계변경을 시행하고자 아래와 같이 보고드림

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명: 청계천 마장꿈놀이터 노후시설 정비사업

□ 기    간: 2023. 4. 19. ~ 7. 8.

□ 위    치: 마장동 802-2일대

□ 계약업체: 주식회사 풍경원 대표 강진숙

□ 도 급 비: 금315,678,700원(금삼억일천오백육십칠만팔천칠백원)

□ 내    용: 노후시설 정비, 물놀이장 조성 등

구 분	실정사항	변경내용	증감액 (천원)
계	도급비 55,241천원 / 관급비 4,163천원 증액
이식 및 제거공	▶ 경관 및 안전성 고려하여 기존 수목 전정 반영	○ 수목전정(약전정) 0주 → 5주	483
철거공	▶ 사토운반 및 폐기물 상차 반영	○ 사토운반 0㎥ → 117.5㎥ ○ 폐기물 상차 0㎥ → 113. 96㎥	3,066
시설 및 포장공	▶ 주민의견 수렴결과 반영하여 트램폴린 수량 증가 ▶ 놀이시설 안전거리 고려하여 포장 공간 확장 ▶ 기계설비실 내부청소 등 유지관리 고려하여 규모 확장 ▶ 휴게공간 뒤편 사면 경사도 완화를 위해 조경석 쌓기 반영 ▶ 공원 경계 녹지대 정비를 위한 조경석 쌓기 반영	○ 트램폴린 1개소 → 2개소 ○ 고무칩포장(T55) 442.4㎡ → 463.9㎡ ○ 고무칩포장(T15) 103㎡ → 119.8㎡ ○ 인조화강석블록포장 433㎡ → 463.9㎡ ○ 기계설비실높이 H1,150m → H1,500m ○ 조경석 쌓기 0m → 31m ○ 조경석 놓기 0ea → 27ea ○ 산돌깔기 0㎡ → 150㎡	25,320
우배수공	▶ 물놀이장 배수 계획 변경 반영 (하천방류→하수관거 연결) ▶ 우기시 사면을 통해 유입되는 우수 처리를 위한 수로관 설치 ▶ 녹지대 유지관리를 위한 Q.C밸브 등 설비 설치	○ 원형맨홀설치 0개소 → 1개소 ○ 측구수로관 0m → 8m ○ 원형수로관 0m → 26m ○ 원형수로관 집수정 0ea → 2ea ○ 연결관(D200,주철) 32m → 0m ○ 연결관(D200) 8m → 0m ○ 연결관(D300) 0m → 72m ○ 집수정 1개소 → 4개소 ○ Q.C 밸브 0set → 2set	11,780
식재공	▶ 잔디광장 그늘목 반영 ▶ 공원 경계 녹지대 정비용 초화류 반영	○ 느티나무 0주 → 1주 ○ 억새(모닝라이트) 0주 → 75본 ○ 사초(에버골드) 0주 → 100주	10,371
기타	▶ 추경 확보 후 CCTV 설치 예정으로, CCTV 관련 배관 선 매설	○ CCTV 파상형경질전선관 0m → 144m ○ CCTV 제어용 케이블 0m → 804m	1,175
제경비	▶ 미사용 제경비 정산 및 설계변경으로 인한 제경비 증액		3,046
관급 자재	▶ 포장면적 증가분 및 자재 할증 반영	○ 고무칩포장(T55) 442.4㎡ → 498㎡ ○ 고무칩포장(T15) 103㎡ → 127㎡ ○ 인조화강석블록포장 433㎡ → 482㎡	4,163

Ⅱ		설계변경 검토

□ 주요 실정사항 및 변경내용

Ⅲ		공사비 변경 예정액

□ 변경 예정액

(단위:원)

구 분		공 사 비			비 고
		당 초	변 경	증 감
총공사비		555,963,100	615,368,000	증 59,404,900
도급비	공급가액	286,980,637	337,200,000	증 50,219,363
	부 가 세	28,698,063	33,720,000	증 5,021,937
	합 계	315,678,700	370,920,000	증 55,241,300
관급비		240,284,400	244,448,000	증 4,163,600

□ 예산활용계획

- 공사 낙찰차액 및 예산잔액 활용

Ⅳ		검토의견

□ 현장여건 반영을 위한 사항으로 상기와 같이 설계변경을 시행하여 쾌적한 하천 환경을 조성하고자 함

붙임  1. 변경내역서 1부.

2. 제비율 검증확인서 1부.  끝.