문서번호	토목부-11725
결재일자	2023. 6. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
이상현		이성주	06/27
			이임섭
협조	주무관		이회진
	주무관		황태선

- 창동 상계 동서간 연결교량 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 - 설계변경(전체 4회, 3차 1회) 검토 보고

- 창동 상계 동서간 연결교량 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 -

설계변경(전체 4회, 3차 1회) 검토 보고

2023. 6.

도시기반시설본부

(토        목        부)

- 창동 상계 동서간 연결교량 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 -

설계변경(전체 4회, 3차 1회) 검토 보고

「창동 상계 동서간 연결교량 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역」의 물가변동 반영 및 효율적인 업무수행을 위해 설계변경을 검토 후 보고 드림

※ 관련근거 : 감리부-23-01191(2023.06.20.)호 "건설사업관리용역 설계변경 요청"

□ 용역 개요

ㅇ 용 역 명: 창동상계 동서간 연결교량 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역

ㅇ 공사규모

- 보차도교 설치 B=32m, L=118m / 보행교 설치 B=10.5~15m, L=110.5m

- (헌릉로)중앙버스전용차로 설치 L=3.2km 버스정류장 8개소

ㅇ 용역기간: '21.04.19.∼'24.05.17.(3차 '23.01.01.∼'23.12.31.)

ㅇ 용 역 비: ************************

ㅇ 계 약 자: ********* 외 2개사

□ 설계변경 검토

ㅇ 설계변경 사유

- 물가변동으로 인한 계약금액 조정(제2회) 반영 - 연결교량, 헌릉로

직전 조정기준일 (기준시점)	적용 기준일 (비교시점)	물가변동 경과일수	조정신청일	조정률	조정금액 (백만원)
***********	***********	****	***********	*****	**

- 건설사업관리기술인 적정 투입계획 반영 필요 - 연결교량

· 당초 3차분 발주 시 감리비 예산이 1,025백만원 필요했으나 금년도 예산이 800백만원으로 편성, 예산에 맞추어 3차분 계약함 ⇒ 적정 투입인원 반영 필요

※ 현재 배치계획 상 8월 이후 토목, 안전분야 감리원 철수, 감리단 운영 불가

· 부족한 감리비는 통계목 변경(시설비 → 감리비)을 통해 예산 확보하고자 함

ㅇ 변경 내용                                            (단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증·감	비 고
전체 4회	도 급 액	*************	*************	**************	·전체 E/S 반영*******
	용역기간	********** ************	********** ************	*
3차 1회	도 급 액	*************	*************	**************	·차수 E/S 반영******* ·적정인원 반영********
	용역기간	********** ************	********** ************	*

ㅇ 금차 용역 투입인원 변경

□ 통계목 변경

ㅇ 금년도 감리비 부족분(276백만원)을 확보하기 위해 시설비 중 일부를 감리비로 통계목 변경

- 창동상계 동서간 연결교량 건설사업(도시개발특별회계)

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
계	**************	**************	*	균형발전본부 동북권사업과
시설비	**************	**************	****************
감리비	***********	*************	***************

- 헌릉로 중앙버스 전용차로 조성(교통사업특별회계)

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
계	*************	*************	*	도시교통실 교통운영과
시설비	*************	*************	**************
감리비	***********	***********	**************

□ 조치 계획

ㅇ 물가변동으로 인한 계약금액 조정(제2회) 반영 및 원활한 사업추진을 위한 건설사업관리기술인 투입계획 변경을 시행하고자 하며

ㅇ 부족한 감리비는 사업 주관부서(동북권사업과, 교통운영과)에 통계목 변경 요청하고자 함

붙임 : 건설사업관리단 설계변경 요청서 1부.  끝.