아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	북부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 심의회 개최 ［2022년 북부수도 관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속단가계약)]

우리사업소에서 시행중인『2022년 북부수도 관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속단가계약)』에 대하여 물량 증 ․ 감 발생으로 설계변경 사유가 발생하여 아래와 같이 설계변경 심의회를 개최코자 합니다.

1. 공사현황

가. 공 사 명 : 2022년 북부수도 관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속단가계약)

나. 공사개요

- **********************************************

**********************************************************

다. 계약기간 : 2022.06.03. ~ 2023.06.30.

라. 도 급 비

단위(원)

구 분	당초금액	변경금액	증·감액
총부기금액	*************	*************	************
1차수 금액	*************	*************	*
2차수 금액	***********	***********	************

마. 계약업체 : **************************

2. 심의회 개최

가. 심의일정 : ********************

나. 심의장소 : *****

다. 심의위원장 : ******

라. 심의의원 : ***************************************

3. 심의내용

가. 계약물량 증․감에 대한 설계변경 사항

- 설계변경의 타당성 여부

- 물량변동의 적정성 여부

- 각종 제반규정 적정 준수여부

- 제경비 적정산정 및 적정적용 여부 등

나. 위 사항을 검토 및 심의하고 심의 결과에 의거 설계변경 조치

붙임   1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 심의신청서 1부.

3. 설계변경 내역서 1부. 끝.

주무관	노제현		급수관리팀장	최용진		급수운영과장	06/27
송병욱
협조자	주무관	남상욱		주무관	박상권		급수운영팀장	이문성
시행	급수운영과-10112	(	2023. 6. 27.	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 강북구 한천로 935(번동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3358	/전송	02-3146-3389	/	shwpgus9@seoul.go.kr	/	부분공개(7)