문서번호	정수시설과-2054
결재일자	2023. 6. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
안전관리팀장		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
이용성		代노성제	06/28
			문인기
협 조
	주무관			한미경
	주무관			김동석

『구의아리수정수센터 제2정수장』 약품동 증설공사 설계변경 보고

2023. 06.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

『구의아리수정수센터 제2정수장』

약품동 증설공사 설계변경 보고

우리센터『제2정수장 약품동 증설공사』시행중 다음과 같은 사유로 계약물량의 증·감이 발생였기에 설계변경 시행코자 함.

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 구의아리수정수센터 제2정수장 약품동 증설공사

❍ 공사기간 : ’22.11.11.~ ’23.06.30.

❍ 계약금액 : *********

❍ 계 약 자 : **********

❍ 공사내용

- 철근콘크리트 : A=97.9㎡(13.6×7.2m), h=8m(2층)

- 구조 : RC + H-beam(철골조)          - 외장 : 알루미늄복합판넬

- 지붕 : 260T 불연 그라스울 판넬       - 내부바닥 : 철근콘크리트 및 내산 라이닝

□ 설계변경 사유 및 내용

○ 본공사 추진 중 다음과 같은 사유로 계약물량 증·감 발생

- 지반 암반층이 11~12m에 분포되어 마이크로파일 강봉 소정의 정착장(3m)확보를 위해 파일 강봉 15m 근입설치

※ 마이크로파일 강봉 24개소(각 15m) 설치

- 관급자재인 이형봉강 및 H형강 납품단가 인상

〔실정보고에 따른 검토보고(방침)(정수시설과-752(2023.03.13.)〕

- 관급자재인 레미콘의 납품지연(시멘트 품귀현상 및 전국적 레미콘 파동)되어(40일 이상 지연 예상) 원활한 후속 공정을 위해 일부 사급자재로 전환

※ 소요물량 144㎥ 중 사급처리 48㎥(관급납품 96㎥)

〔실정보고에 따른 검토보고(방침)(정수시설과-1248(2023.04.14.)〕

- 4대보험 실정산 반영

- 고용개선지원비에 대하여 일용직의 고용 및 근로형태가 본공사 현장 적용요건에 해당되지 않아 제외

○ 주요 수량변경 내용

시설명		수 량		증·감	비 고
		당 초	변 경
마이크로파일 (∅60㎜)		******** ****	******** ****	*****	실정보고 완료
레미콘 수급변경	관급	****	***	*****	“
	사급	**	***	*****
철근 단가변경	봉강	********	********	*********	“
	형강	********	********	*********
4대보험 정산		**	**	****

□ 수량 증·감에 따른 계약금액 변경

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	비 고
총공사비		***********	************	************
도급비	공급가액	***********	************	************
	부가세	***********	************	************
	계	***********	************	************
관 급 비		***********	************	************

□ 도급비 부족에 따른 조치계획

○ 위 도급공사에 따른 도급비 증가액************에 대하여는 다음과 같이 조치코자 함.

- 본공사 관급자 관급자재(약품탱크) 낙찰차액 사용*************

- 송수펌프동 고압모터기동반 교체공사 낙찰차액 사용************

〔실정보고에 따른 검토보고(방침)(정수시설과-752(2023.03.13.)〕

〔실정보고에 따른 검토보고(방침)(정수시설과-1248(2023.04.14.)〕

□ 설계변경 심의(검토) 내용

○ 위 변경 내용에 대하여 자체 설계변경 심의위원회를 개최하고 심의 결과에 따라 설계변경 시행코자 함

○ 설계변경심의 위원회

- 일 시 : 2023.06.28.(수) 15:00~

- 장 소 : 정수시설과 사무실

- 심의사항

‣ 설계변경의 타당성

‣ 제경비 산정 및 적용 적정성 여부

‣ 물량변동의 적정성 여부

‣ 각종 제반 규정 준수여부 등

- 위 원

구 분	직 급	성 명	비 고
위원장	정수시설과장	*****	**
위 원	행정주사	*****
위 원	공업주사	*****
위 원	시설주사	*****
위 원	시설주사	*****

붙임 : 1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 원가계산 제비율 검증확인서 1부.

4. 심의의견서(서식) 1부.

5. 실정보고에 따른 검토보고서 각1부.  끝.