아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	구의아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(약품동 증설 전기 공사)

우리 정수센터에서 시행 중인 '약품동 증설 전기 공사'에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명: 약품동 증설 전기 공사

2. 공사기간: 2022. 12. 1. ~ 2023. 6. 30.

3. 계약상대자: ****************

4. 변경사유

- 물량 증감사항 반영 및 보험료 정산

- 선행 공정(건축) 지연에 따른 공기 연장

5. 설계변경내용                                                 (단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증‧감	비고
계약금액	***********	**********	**********
공사기간	’22.12.1.~’23.6.30.	’22.12.1.~’23.7.31.	1개월 연장

- 지체상금 부과여부: 미부과

6. 예산과목: 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치(정수센터 시설비), 시설비및부대비, 시설비

붙임  1. 설계변경 보고서 1부.

2. 설계변경 심의서 1부.

3. 설계변경 내역서 및 검증 확인서 각 1부.

4. 변경계약 합의서 1부.  끝.

주무관	노성제		정수시설과장	代노성제		구의아리수정수센터소장	06/28
문인기
협조자	주무관	한미경		주무관	김동석		행정관리과장	이혜진
시행	정수시설과-2044	(	2023. 6. 28.	)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 광나루로 571, 구의아리수정수센터 (구의동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5475	/전송	02-3146-5409	/	nsj@seoul.go.kr	/	부분공개(5)