문서번호	시설개선과-5369
결재일자	2023. 6. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	주무관	시설개선과장
정욱	박공성	06/28
		이균형

『2023년 경기장 기계설비 유지보수공사(연단단가)』 설계변경 승인요청 검토 보고

『2023년 경기장 기계설비 유지보수공사(연간단가)』

설계변경 승인요청 검토 보고

2023.   06.  28. (수)

체육시설관리사업소

(시설개선과)

『2023년 경기장 기계설비 유지보수공사(연간단가)』

설계변경 승인요청 검토 보고

『잠실종합운동장 기계설비 유지보수공사(연간단가)』계약 업체로부터 설계변경 승인요청이 있어 검토 결과를 아래와 같이 보고 드림.

□ 관련근거

ㅇ 설계변경 승인요청 : ********************************)

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 2023년 경기장 기계설비 유지보수공사(연간단가)

ㅇ 공사기간 : 2023. 2. 2. ~ 12. 08.

ㅇ 계약금액 : *****************************

ㅇ 계약업체 : ************

□ 설계변경 내용

ㅇ 공사금액 : 변경 없음

ㅇ 변경사항 : 수량 변경 및 신규공종 추가(기존 181공종 ⇒ 219공종)

□ 검토결과

ㅇ *****************************************************

붙임  1. 설계변경 승인요청 공문 1부.

2. 설계변경내역서 및 합의서 등 각 1부.  끝.