문서번호	어르신여성과-26438
결재일자	2023. 06. 28
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		어르신복지시설팀장		어르신여성과장		복지경제국장
박광수		박이례		김유철		전결 06/28
						이경자
협조

- 행촌제2경로당 그린리모델링공사 해체감리용역 -

완수기한 연기 검토보고

복지경제국

어르신여성과

- 행촌제2경로당 그린리모델링공사 해체감리용역 -

완수기한 연기 검토보고

행촌제2경로당 그린리모델링공사 해체공사가 지연됨에 따라 불가피 하게 감리용역의 준공기한 연기 사항이 발생하여 검토 후 보고함.

Ⅰ		용역 개요

□ 용 역 명: 행촌제2경로당 그린리모델링공사 해체감리용역

□ 용역기간: 2022. 12. 16. ~ 2023. 6. 30.

□ 계약금액: 금13,200,000원(금일천삼백이십만원)

□ 계약업체: 토미건축사사무소(대표 조명철)

Ⅱ		검토 사항

□ 완수기한 연기

용역기간		변경일수
변경 전	변경 후	(증) 21일
2022. 12. 16. ~ 2023. 06. 30.	2022. 12. 16. ~ 2023. 07.21.

□ 연기사유: 해체공사 지연(기초 보강 등)에 따른 전체 공정 순연

□ 지체상금 부과여부: 미부과(계약업체의 귀책사유 없음)

Ⅲ		검토 의견

□ 해체 본공사 지연에 따른 것으로 완수기한을 연기하고자 함.  끝.