현장중심! 민생중심! 더불어 행복한 성북
	성 북 구
수신	내부결재
(경유)
제목	장위-4 소구역 하수관로 정비사업(장기계속) 설계변경(제2회-1차 준공) 시행

우리 구에서 시행중인「장위-4 소구역 하수관로 정비사업(장기계속)」에 대하여 아래와 같이 설계변경(제2회-1차 준공)을 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명: 장위-4 소구역 하수관로 정비사업(장기계속)

2. 공사기간: 2022.09.13. ~ 2024.10.31.(1차:2022.9.13.~2023.6.30.)

3. 도 급 자: ㈜거림건설 대표 기남경, 동문건설(주) 대표 이상주

4. 설계변경 내역

가. 1차(제2회-준공)

(단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감		비 고
총 공사비	2,767,189,000	2,767,189,000		-
도급비	1,504,450,000	1,867,640,000	증)	363,190,000
관급비	310,550,000	394,600,000	증)	84,050,000
이전비	952,189,000	504,949,000	감)	447,240,000

나. 총차(제2회)

(단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감		비 고
총 공사비	10,566,474,000	10,566,474,000		-
도급비	7,212,530,000	7,212,530,000		-
관급비	1,577,640,000	1,431,370,000	감)	146,270,000
이전비	1,776,304,000	1,922,574,000	증)	146,270,000

5. 설계변경 사유: 1차분 현장여건 변경에 따른 시공물량 증·감

6. 예산과목: 물재생계획과, 하수시설관리, 소구역 하수관로 정비사업, 장위-4 소구역 하수관로 정비사업, 시설비및부대비, 시설비(하수도공기업특별회계)

※ 2차분 설계변경은 추후 예정

붙  임  1. 설계변경 사유서(제2회) 1부.

2. 설계변경 내역서 각 1부.

3. 제비율검증확인서 1부(1차분).

4. 감리단 보고 1부.  끝.

주무관	박재우		하수담당	김정훈		치수과장	代오강일		건설교통국장	06/28
김석우
협조자	계약담당	조은숙		재무과장	김은석
시행	치수과-10687	(	2023. 6. 28.	)	접수		(		)
우	02848	서울특별시 성북구 보문로 168, 성북구청 치수과	/	http://www.sb.go.kr
전화	02)2241-3635	/전송	02-2241-6563	/	jeewoos@sb.go.kr	/	부분공개(5)