문서번호	기전과-8207
결재일자	2023. 6. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
진수경		06/29
		代박신범
협조

원인자부담공사 변경승인 검토 보고 「시립강동 실버케어센터 건립공사 중 교통안전표지 설치공사」

원인자부담공사 변경승인 검토 보고

「시립강동 실버케어센터 건립공사 중

교통안전표지 설치공사」

2023. 6. 29.

동부도로사업소

(기전과)

원인자부담공사 변경승인 검토 보고

시립강동 실버케어센터 건립공사 중 교통안전표지 설치공사 관련 원인자부담공사 변경승인 요청에 대한 검토 보고

Ⅰ		관련 근거

□ 교통신호기 이설공사 준공기한 연기요청
(시립강동 실버케어센터 건립공사)

ㅇ *****************************호

□ 교통안전표지 원인자부담공사 승인 통보
「시립강동 실버케어센터 건립공사 중 교통안전표지 설치공사」

ㅇ 동부도로사업소 기전과-30151(2022.11.4.)호

Ⅱ		공사 개요

□ 공 사 명 : 시립강동 실버케어센터 건립공사 중 교통안전표지 설치공사

□ 공사위치 : 강동구 고덕동 317-23

□ 공사기간 : ****************

□ 원인자 및 업체현황

구분	원 인 자	설 계 사	감 리 사	시 공 사
표지	******** ***	*******	*********	*****

Ⅲ		검토 내용

□ 변경사항

구 분	당 초	변 경	비 고
공사기간	****************	****************

□ 변경사유

o 전체공정 순연으로 인한 준공기한 연기

Ⅳ		검토 의견

□ 변경승인 서류를 검토한 바 적정하여 승인 처리하고자 함

붙임  1. 원인자부담공사 변경승인 요청 제출 서류 1부.

2. 감리사 서류(기술검토의견서) 1부.

3. 설계내역서 1부.

4. 설계도면 1부.  끝.