문서번호	교량안전과-11074
결재일자	2018.6.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		강북일반교량팀장	교량안전과장
배상현		손창익	06/25 한유석
협조

[2017 모래내고가 보수공사 ]

준공기한 연기 요청 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 6

교량안전과

(강북일반교량팀)

[2017 모래내고가 보수공사 ]

준공기한 연기 요청 검토 보고

우리과에서 현재 시행중인 『2017 모래내고가 보수공사』에 대한 감리단의 준공기한 연기요청 검토보고 임.

Ⅰ		관 련 근 거

□ ㈜유신 1종교량 제18-166호(2018.06.21.) 준공기한 연장 요청

Ⅱ		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 2017 모래내고가 보수공사

□ 공사내용 : 슬래브 유리섬유 보강 1식, 차량방호시설 개량 1식, 교면포장 30a 등

□ 공사기간 : 2017.08.24. ~ 2018.06.30

□ 도 급 사 : 태강산업개발(주) 대표 윤강문

□ 도 급 액 : 1,513,000천원

□ 감 리 사 : ㈜유신, ㈜대한콘설탄트

Ⅲ		그 간 추진사항

□ ’17.09 ~ 11 : RC박스 하부 섬유보강 완료

□ ’17.11.04 : 철도시설공단 공사관련 협의 시작

□ ’18.03.24 : 교통소통대책 심의 완료

□ ’18.03.28 : 철도시설공단 주관 기술자문회의 개최

□ ’18.04.03 : 기술자문회의 결과 통보

□ ’18.05~06 : 코레일 공사관련 협의(7월 철도차단 관련)

Ⅳ		준공기한 연기 요청 및 검토

□ 감리단 연기 요청

당 초	변 경	비 고
2017.08.24.∼2018.06.30	2017.08.24 ∼ 2018.12.31	6개월 연기

□ 연기 요청 사유

- 철도 과선구간 유관기관(코레일 등) 공사협의 지연 등

□ 검토 결과

- 현재 철도시설공단 및 코레일과의 공사협의가 마무리 단계이므로  준공기한 6개월 연기는 과다한 것으로 판단되므로 3개월 연기  승인 통보코자 함.

당 초	변 경	비 고
2017.08.24.∼2018.06.30	2017.08.24 ∼ 2018.09.30	3개월 연기

□ 지체상금 부과 : 미부과

Ⅴ		행 정 사 항

□ 재무과 통보하여 준공기한 연기 처리.

붙임 : 감리단 준공기한 연장 요청 1부.  끝.