문서번호	건축부-10171
결재일자	2023. 6. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		문화시설과장	건축부장
김동석		왕승찬	06/29
			代정채문
협조

『서울 어울림체육센터 건립공사』

건설폐기물 처리용역 계약변경(1차) 검토 보고

2023. 6. 28. (수)

도시기반시설본부

(건축부)

『서울 어울림체육센터 건립공사』

건설폐기물 처리용역 계약변경(1차) 검토 보고

『서울 어울림체육센터 건립공사 건설폐기물 처리용역』의 실반출물량으로 내역을 조정하여 계약변경을 검토하고 보고 드림

□ 용역개요

ㅇ 용 역 명: 서울 어울림체육센터 건립공사 건설폐기물 처리용역

ㅇ 위    치: 서울특별시 노원구 상계동 1268

ㅇ 규    모: 지하 2층 / 지상 3층, 연면적 14,779.98㎡

(수영장 10레인, 볼링장 32레인, 다목적 체육관 등)

ㅇ 계약금액: 금 131,154천원 (1차: 금 110,000천원)

ㅇ 계약기간: '22. 7. 25.~'25. 1. 22. (913일)

(1차: '22. 7. 25.~'23. 7. 24.)

ㅇ 계측용역사: ㈜씨와이환경 외 1개사

ㅇ 공 정 율: 18.1%

□ 추진경위

ㅇ '22.  7. 25.  : 공사 착공 (건축, 토목, 조경)

ㅇ '22.  7. 14.  : 용역 계약

ㅇ '22.  7. 25.  : 용역 착수

ㅇ '22.  9. 30.  : 기존 주차장 바닥 철거 및 폐아스콘 반출

ㅇ '22. 11. 24.  : 주차장 측구 철거 및 폐콘크리트 반출

ㅇ '23.  2.   2.  : 기존 지장물 철거 및 혼합폐기물 반출

ㅇ '23.  6. 현재 : 토목 터파기 중

□ 계약변경 내용

ㅇ 관련근거 등

-『건설폐기물 처리용역 1차 내역조정 계약변경 요청』어울림 제2306-044호(2023. 6. 28.)

- 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제9장 계약일반조건 제6절(공사설계 변경)

- 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제97조(설계변경 관리)

- *********7-01호(2023. 6. 27.) 건설폐기물 처리용역 1차 내역조정 계약변경 요청

ㅇ 계약변경 사유

- 1차 용역 준공기준 실제 반출물량에 대한 정산

ㅇ 주요변경 내용

(단위: 톤)

구분		변경 전	변경 후	증감	비고
공사폐기물	폐콘크리트	479.927	0	감) 479.927
	폐제류	59.117	0	감) 59.117
	혼합폐기물	82.764	0	감) 82.764
기존부지폐기물	폐콘크리트	510.888	496.820	감) 14.068
	폐아스팔트	2,133.240	1,426.260	감) 706.98
	혼합폐기물	58.022	41.060	감) 16.962
운 반 비		2,702.15	1,964.14	감) 738.01
스마트송장		2,827.194	1,964.14	감) 863.054

ㅇ 용역금액 변경 검토

(단위: 원)

구 분	변경 전	변경 후	공사비 증·감	비고
직접공사비	100,018,921	68,739,938	감) 31,278,983
간접공사비	-18,921	-3,574	-
공급가액	100,000,000	68,736,364	감) 31,263,636
부가가치세	10,000,000	6,873,636	감) 3,126,364
합 계	110,000,000	75,610,000	감) 34,390,000

ㅇ 계약변경 내용

구분		변경 전	변경 후	증·감	비고
총차	기간	'22.7.14 ∼ '25.1.22.	'22.7.14 ∼ '25.1.22.	변경없음
	금액	131,154,000원	131,154,000원	변경없음
1차	기간	'22.7.14 ∼ '23.7.24.	'22.7.14 ∼ '23.7.24.	변경없음
	금액	110,000,000원	75,610,000원	감) 34,390,000원

ㅇ 예산과목: 도시기반시설본부 건축부, 시민체육 및 국제스포츠 진흥발전, 시민체육공간 확충, 서울 어울림체육센터 건립, 시설비및부대비, 시설비 (예산편성부서 : 관광체육국 체육정책과)

□ 처리의견

ㅇ 건설폐기물 처리용역 계약변경 요청 관련사항은 ‘적정’하다고 판단되며,

ㅇ 건설폐기물 처리용역(1차)에 대하여 변경 계약을 추진하고자 함

붙임: 건설폐기물 처리용역 1차 내역조정 계약변경 요청 1부.  끝.