문서번호	토목부-12016
결재일자	2023. 7. 3.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
이회진		이성주	07/03
			이임섭
협조
	주무관		이상현

- 창동 상계 동서간 연결교량 보행교 건설공사 -

설계변경(전체7회, 2차4회)검토 보고

2023. 06.

도시기반시설본부

(토  목  부)

- 창동 상계 동서간 연결교량 보행교 건설공사 -

설계변경(전체7회, 2차4회)검토 보고

창동 상계 동서간 연결교량 보행교 건설공사 설계변경(전체7회, 2차4회) 검토결과 및 조치계획을 보고 드림

□ 근   거

○ 공사 설계변경(전체7회, 2차4회) 검토결과보고(보행교) - 감리부-23-01235호('23.06.28.)

□ 공사개요

○ 사 업 명 :  창동 상계 동서간 연결교량 보행교 건설공사

○ 규    모 :  보행교 건설(연장 110.5m, 폭 10.0~15.0m)

○ 사업기간 :  '21.04.19. ∼ '24.04.18. (2차 '21. 10. 17. ∼ '23. 10. 16.)

○ 도 급 비 :  **************************

○ 시공사/건설사업단 : *****************************

□ 설계변경 사유

○ 창동 상계 동서간 연결교량 건설공사 현안사항 및 공사 추진계획 반영(토목부-9186, `23.05.19.)

- `23년도 사업예산 부족에 따른 공사추진 방안으로 보차도교 공사비를

활용하여 보행교 정상 추진

○ 실정보고 승인사항 및 물가변동 반영

**********************************************

********************************************

**************************************************

*************************************************

**************************************************

**********************************************

********************************************

□ 설계변경 내역 검토

○ 전체7회 : ********************************************

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
총공사비	**************	**************	*****************
도 급 비	**************	**************	*****************
관 급 비	*************	*************	*****************
이 전 비	**********	**********	*
공사기간	*************************	*************************	*****

(단위 : 천원)

공 종	공 사 비				비 고
	당 초	변 경	증. 감
토 공	*******	*******	**	*******
2. 구조물공	*******	*********	**	*******
3. 상부공	*********	*********	**	******
4. 가시설공	*******	*******	**	*******
5. 부대공	*********	*********	**	*******
6. 운반공	*****	******	**	*****
7. 사급자재	*******	*******	**	******
직접비 계	*********	*********	**	*******
간접비	*********	*********	**	*******
물가상승(K1∼K4)	*********	*********	**	******
제경비제외공종	*******	*******	**	******
공급가액	**********	**********	**	*********
부가가치세	*********	*********	**	*******
도 급 액	**********	**********	**	*********

○ 2차4회 : ******************************************

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
총공사비	*************	*************	*****************
도 급 비	*************	*************	*****************
관 급 비	***********	************	*****************
이 전 비	*	*	*
공사기간	*************************	*************************	*****

(단위 : 천원)

공 종	공 사 비				비 고
	당 초	변 경	증. 감
1. 토공	******	*******	**	*******
2. 구조물공	*******	*******	**	*******
3. 상부공	*********	*********	**	*******
4. 가시설공	******	*******	**	*******
5. 부대공	*******	*******	**	*******
6. 운반공	***	*****	**	*****
7. 사급자재	***	***		*
직접비 계	*********	*********	**	*********
간접비	*********	*********	**	*******
물가상승(K1∼K4)	*******	*******	**	*******
제경비제외공종	******	*******	**	******
공급가액	*********	*********	**	*********
부가가치세	*******	*******	**	*******
도 급 액	*********	*********	**	*********

□ 조치계획

○ `23년도 사업예산 부족에 따른 공사추진 계획 및 실정보고 승인내용을

반영한 사항으로 상기 검토결과 같이 설계변경 및 변경계약을 시행하여

사업추진에 만전을 기하고자 함.

※ 공사비 집행 계획(안)

구 분	합 계	1차공사(준공)	2차공사(금회)	향후(2024년)	비 고
총공사비	**************	*************	*************	*************
도 급 비	**************	*************	*************	*************
관 급 비	*************	***********	***********	************
이 전 비	**********	**********	*	*

붙 임 : 건설사업관리단 설계변경 검토 보고서 1부. 끝.