문서번호	시설건설과-6256
결재일자	2023. 7. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설건설과장	시설부장
윤원영		이승우	07/03
			전태호
협조

「함지박사거리~방배초교 입구 장기사용 송배수관 정비공사」

토사반입 관련 실정보고 검토결과 보고

2023.  7. 3. (월)

상수도사업본부

(시설부)

「함지박사거리~방배초교 입구 장기사용 송배수관 정비공사」

토사반입 관련 실정보고 검토결과 보고

시설부장:전태호☎3146-1501 시설건설과장: 이승우☎1490 담당: 윤원영☎1516

「함지박사거리~방배초교입구 장기사용 송배수관 정비공사」 시행 중 토사반입 관련 실정보고서 제출에 따른 검토결과를 보고드림.

□ 관련문서

ㅇ 서울시설공단 공사감독2처-6485(2023. 6. 20.)호 “현장실정 검토보고서 제출(6차)”

□ 공사현황

ㅇ 공 사 명: 함지박사거리~방배초교 입구 장기사용 송배수관 정비공사

ㅇ 공사개요: *********************

ㅇ 공사기간: 2022. 8. 16.~2023. 7. 29.

ㅇ 도 급 비: ***************

ㅇ 시 공 사: **************

ㅇ 공 정 률: 57%(***********)

□ 현황 및 문제점

① 공사 중 발생 토사는 중간 집하장을 거쳐 수도권매립지로 반출토록 설계되었음

- 공사현장 → 중간 집하장(설계상 장소 미지정) → 수도권매립지

② 공사장 내 또는 주변 지역에 부지확보가 어려워 매립지로 직접 반출하려 했으나 양질의 토사가 아닌 사유로 반입불가 통보(매립부-1087(2023. 5. 2.)호)

③ 이에 따라 수도권 내 사토장을 확보하여 발생 토사를 중간 집하장 경유없이 직접 반출 중임

<사토장 직접 반출에 따른 공사비 증․감 현황>

- 중간 집하장 미경유로 인한 부대비용(소운반, 상차, 부지임대료 등) 절감 및 토사 운반거리 단축반영*************하여 ************

공종명	규 격		수 량(㎥)			공사비(천원)
			당초	변경	당초		변경	증․감
**** *****	********		*****	*	*****		*	**********
**** ***********	************************		*****	*	******		*	**********
***** *************	**********************		*****	*	******		*	**********
*****	**********************		*****	*	******		*	**********
**** *****	************		*****	*	*****		*	**********
******* *******			****	*	******		*	**********
**** *************	***********************			*****	*		*******	**********
*								**********
***********		*********
*******************************************************************		*

➃ **********************************************

□ 조치계획

ㅇ 상기 사토장 변경에 따른 공사비 증․감 내용에 맞게 설계변경 및 정산

ㅇ 기존 중간 집하장 이용기간 만료에 따른 조속한 대체부지 확보 및 미보고 상태에서 사토장으로 우선 변경한 건과 같은 사례 방지를 위한 사전보고 철저토록 강조하여 감리사에 통보

붙임  실정보고 서류 각 1부.  끝.