문서번호	정수시설과-2153
결재일자	2023. 7. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
안전관리팀장		직무대리	구의아리수정수센터소장 직무대리
이용성		노성제	07/04
			代김동석
협 조
	주무관			한미경
	주무관			김동석

『구의아리수정수센터 제2정수장』 약품동 증설공사 부족예산 조치계획 보고

2023. 07.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

『구의아리수정수센터 제2정수장』

약품동 증설공사 부족예산 조치계획 보고

우리센터『제2정수장 약품동 증설공사』시행중 도급공사비의 증가 등이 발생하여 이에따른 부족예산을 다음과 같이 조치하여 사업관리에 만전을 기하고자 함.

※ 정수시설과-2062(2023.06.29.)호 관련(설계변경 보고)

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 구의아리수정수센터 제2정수장 약품동 증설공사

❍ 공사기간 : ’22.11.11.~ ’23.06.30.

❍ 계약금액 : 409,209천원

❍ 계 약 자 : 이하우징코리아(주)

❍ 공사내용

- 철근콘크리트 : A=97.9㎡(13.6×7.2m), h=8m(2층)

- 구조 : RC + H-beam(철골조)          - 외장 : 알루미늄복 합판넬

- 지붕 : 260T 불연 그라스울 판넬       - 내부바닥 : 철근콘크리트 및 내산 라이닝

□ 공사물량 증·감 내용

○ 본공사 추진 중 계약물량 증·감 발생

시설명		수 량		증·감	비 고
		당 초	변 경
****** ************		******** ****	******** ****	*****	**** ***
**** ****	**	****	***	*****	*
	**	**	***	*****
*******	**	********	********	*********	*
	**	********	********	*********
*******		**	**	****

□ 공사비 증·감 내용

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	비 고
총공사비		***********	************	************
도급비	공급가액	***********	************	************
	부가세	***********	************	************
	계	***********	************	************
관 급 비		***********	************	************

□ 공사비 등 부족에 따른 조치계획

○ 위 도급공사에 따른 도급비 증가액************에 대하여는 다음과 같이 조치코자 함.

- 본공사 도급자 관급비(레미콘, 철근 등) 집행잔액 사용*************

- 본공사 관급자 관급비(약품탱크) 낙찰차액 사용*************

- 송수펌프동 고압모터기동반 교체공사 낙찰차액 사용*********

〔실정보고에 따른 검토보고(방침)(정수시설과-752(2023.03.13.)〕

〔실정보고에 따른 검토보고(방침)(정수시설과-1248(2023.04.14.)〕

○ 아울러 본공사의 건설공사 재해예방 기술지도비 실정산에 따른 소요예산************에 대하여는 송수펌프동 고압모터기동반 교체공사 낙찰차액을 사용************코자 함.

〔기술지도계약서 2022-삼지종A120695〕

붙임 : 1. 약품동 증설공사 설계변경 보고 1부.

2. 실정보고에 따른 검토보고서 각1부.

3. 건설공사 재해예방 기술지도계약서 및 세금계산서 각1부.  끝.