문서번호	토목부-12125
결재일자	2023. 7. 4.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
이회진		이성주	07/04
			이임섭
협조
	주무관		이상현

- 창동 상계 동서간 연결교량 보차도교 건설공사 -

설계변경(전체6회, 2차1회)검토 보고

2023. 07.

도시기반시설본부

(토  목  부)

- 창동 상계 동서간 연결교량 보차도교 건설공사 -

설계변경(전체6회, 2차1회)검토 보고

창동 상계 동서간 연결교량 보차도교 건설공사 설계변경(전체6회, 2차1회) 검토

결과 및 조치계획을 보고 드림

□ 근   거

○ 공사 설계변경(전체6회, 2차1회)검토결과 보고(보차도교) - 감리부-23-01236호('23.06.28.)

□ 공사개요

○ 사 업 명 : 창동 상계 동서간 연결교량 보차도교 건설공사

○ 규    모 : 보차도교 건설(연장 118.0m, 폭 32.0m)

○ 사업기간 : '21.04.19. ∼ '24.04.18. (1차 '21.04.19. ∼ '22.11.22.)

○ 도 급 비 : *************************

○ 시공사/건설사업단 : *******************************

□ 설계변경 및 공기연장 사유

○ 창동 상계 동서간 연결교량 건설공사 현안사항 및 공사 추진계획 반영(토목부-9186, `23.05.19.)

- `23년도 사업예산 부족에 따른 공사추진 방안으로 보차도교 공사비를

활용하여 보행교 정상 추진

- 사업예산 조정에 따른 강교제작 등 정상공정 추진이 어려우며 하천공사           특성상 수방기간 공사중지 등으로 공기연장이 불가피 한바 공정계획을

변경하고 설계변경 및 준공기한 연기 추진

· 준공기한 : 당초 `24.04.18 → `25.05.31(408일 연장)

○ 실정보고 승인사항 및 물가상승 반영

- `23.01.04. : 스마트 안전기술 도입 실정보고 승인(도기본-23-18703)

- `23.02.07. : 한중콘크리트 양생 실정보고 승인(도기본-23-21428)

- `23.02.08. : 설계도서 변경 실정보고 승인(도기본-23-21564)

- `23.02.13. : 제4회 물가변동 실정보고 승인(도기본-23-21818)

- `23.04.04. : 수방기간 하천사면보호(2회차) 실정보고 승인(도기본-23-25146)

- `23.05.04. : 아레나부지토사반출계획 실정보고 승인(도기본-23-27387)

- `23.05.09. : 세굴방지블록 실정보고 승인(도기본-23-27552)

□ 설계변경 내역

○ 전체 6회 : *********************************************

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증·감		비고
****회	*****	**************	**************	**	*************
	******	**************	**************	**	*************
	******	*************	*************	**	**********
	****** ********	************	************		*
	****	***********************	**********************	*	****

(단위 : 천원)

공 종	공 사 비 (천원)				비 고
	당 초	변 경	증. 감
******	***********	***********	**	**********
**********	**********	**********	**	********
*******	********	********	**	*******
*******	********	********		*
**************	********	********	**	********
**************	********	********	**	****
**************	********	********	**	*******
**************	*	********	**	********
****	***********	***********	**	**********
*****	**********	**********	**	********
*****	***********	***********	**	**********

○ 2차 1회  : *********************************************

구 분		당 초	변 경	증·감		비고
2차 1회	*****	*************	*************	**	*************
	******	*************	*************	**	*************
	******	***********	***********	**	**********
	****** ********	**	*		*
	****	**********************	***********************		****

(단위 :천원)

공 종	공 사 비 (천원)				비 고
	당 초	변 경	증. 감
******	**********	**********	**	**********	*
**********	********	********	**	********	*
*******	*******	*******	**	******	*
*******	*******	*	**	*******	*
**************	********	********	**	********	*
**************	********	********	**	********	*
**************	********	********	**	*******	*
**************	*	********	**	********
****	**********	**********	**	**********	*
*****	********	********	**	********	*
*****	**********	**********	**	**********	*

□ 조치계획

○ `23년도 사업예산 부족에 따른 공사추진 계획 및 실정보고 승인내용을

반영한 사항으로 상기 검토결과 같이 설계변경 및 변경계약을 시행하여         사업추진에 만전을 기하고자 함.

※ 공사비 집행 계획(안)

구 분	합 계	1차공사(준공)	2차공사(금회)	향후(2024년 이후)	비 고
****	**************	*************	*************	*************
*****	**************	*************	*************	*************
*****	*************	***********	***********	***********
*****	************	*********	*	*

붙 임 : 건설사업관리단 설계변경 검토 보고서 1부. 끝.