문서번호	도로관리과-109
결재일자	2023. 7. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		포장계획팀장	도로관리과장
김원재		백종은	07/04
			代윤인식
협조
	주무관		김태우

서울특별시 도로포장 상태 조사 및 분석 계약변경 검토 보고

서울특별시 도로포장 상태 조사 및 분석

계약변경 검토 보고

2023.  7. 4. (화)

재 난 안 전 관 리 실

(도로관리과)

서울특별시 도로포장 상태 조사 및 분석

계약변경 검토 보고

’23년도 노후포장 정비공사 중 주요 구간에 대하여 조사 결과를 반영한 설계 도면을 작성하는 과업 내용이 추가되어 계약을 변경하고자 함

□ 사업개요

ㅇ 사 업 명 : 2023년 서울특별시 도로포장 상태 조사 및 분석

ㅇ 사 업 비 : 1,585,320천원

ㅇ 사업기간 : 2023.3.13.∼12.8.

ㅇ 수행기관 : ㈜로드텍(공동도급 : ㈜아이리스테크놀로지)

ㅇ 과업내용

- 서울특별시도 도로포장 표면상태 조사·분석 및 DB구축(7,280km)

- 최적 유지관리를 위한 보수구간 및 공법(안) 제시

- 도로포장 상태 조사 및 분석 매뉴얼 작성

- 장기공용성 평가구간 추적조사

□ 변경사유

ㅇ 과업내용 추가로 계약금액 변경(증액) 필요

ㅇ 추가 과업내용 : 2023년 노후포장도로 정비를 위한 도면작성

******************************

***********************

***************

***************************************

□ 설계변경 내역

ㅇ******************************

*************************************

**	******	****
**	*********	************************
**	*********	***************** ************************************** **************************************** *******************************
**	**********	*

ㅇ 용역기간 : 변동없음

- 당초 : 2023.3.13.∼12.8. → 변경 : 당초와 동일

ㅇ 예산 : 2023년 서울시 도로포장 상태 조사 및 분석 용역 낙찰차액 활용

- 예산과목 : 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물관리(도시개발), 노후 포장도로 정비, 시설비

※ ********************************************

□ 향후계획

ㅇ 2023.07. : 용역변경 계약 요청(도로관리과→재무과)

ㅇ 2023.12. : 용역 준공

붙임 1. 합의각서 1부.

2. 설계내역서(변경) 1부.